СН 283-64 

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Дата введения 1965-01-01

 РАЗРАБОТАНЫ впервые 

В разработке Временных норм продолжительности проектирования принимали участие (ведущие институты) Гипромез, Гипроцветмет, Центрогипрошахт, Гипронефтезавод, Госхимпроект, Теплоэлектропроект, Гидропроект, Гипротяжмаш, Гипростройматериалы, Гипролеспром, ГПИ-1, Гипропищепром, Гипрорыбпром, Гипрохолод, Промэнергопроект, Гипрониисельхоз, Гипротранстрой, ГСПИ Министерства связи СССР и Ленпроект. 
                 
УТВЕРЖДЕНЫ Государственным комитетом по делам строительства СССР 30 июля 1964 г. 
            
Временные нормы продолжительности проектирования предназначаются для использования их при планировании и организации проектных и изыскательских работ и обязательны для применения планирующими органами, министерствами, ведомствами, совнархозами и исполкомами местных Советов депутатов трудящихся, а также проектными и изыскательскими организациями для определения продолжительности проектных и изыскательских работ. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящими нормами устанавливается продолжительность выполнения инженерных изысканий и всего комплекса проектных работ (технологическая, строительная и др.) для строительства предприятий, зданий и сооружений промышленности, транспорта, связи, энергетики и сельского хозяйства (часть I); планировки и застройки городов, жилых и гражданских зданий (часть II). 

С учетом того, что проектирование осуществляется, как правило, с применением унифицированных секций и пролетов или типовых проектов, где их применение установлено как обязательное. 

Примечание. Настоящие нормы не распространяются на разработку типовых проектов, проектов для экспериментального строительства, а также на выполнение специальных изысканий. 

2. Настоящие нормы предназначаются для использования при планировании и организации проектных и изыскательских работ и являются обязательными для применения планирующими органами, министерствами, ведомствами, совнархозами и исполкомами местных Советов депутатов трудящихся, а также проектными и изыскательскими организациями для определения продолжительности проектных и изыскательских работ. 

3. Установленная нормативная продолжительность проектирования является оптимальной. 

Продолжительность проектных и изыскательских работ, устанавливаемая для конкретных объектов строительства при планировании, заключении договоров или выдаче нарядов-заказов, не должна превышать нормативной продолжительности, определенной согласно нормам, но по договоренности заказчика проекта с проектной организацией может быть уменьшена по сравнению с последней. 
            
Сроки выдачи проектными и изыскательскими организациями взаимных заданий на проектирование и выполнение отдельных частей проекта устанавливаются во взаимно согласованных графиках, в пределах сроков, установленных настоящими нормами. 

Графики обязательно прилагаются к договору на выполнение проектных и изыскательских работ между ведущей проектной организацией и субподрядчиком, принимающим на себя выполнение отдельных видов проектных или изыскательских работ. 

График является неотъемлемой частью договора. 

4. Приведенная нормативная продолжительность проектных и изыскательских работ установлена: 

а) применительно к условиям проектирования вновь строящихся предприятий, зданий и сооружений, а также зданий и сооружений, намечаемых к строительству на расширяемых или реконструируемых предприятиях; 

б) исходя из того, что проектирование осуществляется в две стадии - проектное задание и рабочие чертежи - с применением унифицированных типовых секций и пролетов или привязкой действующих типовых проектов, где необходимо их обязательное применение; 

в) применительно к объему, составу и порядку выполнения проектных и изыскательских работ, установленному действующими инструкциями по разработке проектов и смет для строительства и инструкциями по инженерным изысканиям для строительства; 

г) с учетом того, что проектные и изыскательские работы выполняются проектной организацией - генеральным проектировщиком - с привлечением специализированных проектных и изыскательских организаций. 

5. В нормах для каждого из объектов строительства приведены: 

а) продолжительность выполнения всего комплекса изыскательских и проектных работ на стадии проектного задания, а также нормативная продолжительность отдельно изыскательских и проектных работ; 

б) совмещенная нормативная продолжительность выполнения комплекса изыскательских и проектных работ на стадии рабочих чертежей (в объеме, указанном в п.6). 

Примечания: 1. Установленная нормами продолжительность выполнения на весь комплекс изыскательских и проектных работ на стадии проектного задания менее суммы нормативной продолжительности изыскательских и нормативной продолжительности проектных работ, вследствие частичного совмещения этих работ во времени. 

2. Изыскательские организации обязаны выдавать проектным институтам промежуточные материалы, обеспечивающие возможность начала проектирования в сроки, устанавливаемые нормами с учетом частичного совмещения проектных и изыскательских работ. 

6. Нормативная продолжительность выполнения комплекса изыскательских и проектных работ на стадии рабочих чертежей установлена исходя из того, что в нормируемый период подлежат выполнению следующие работы: 

а) по предприятиям, зданиям и сооружениям, нормативная продолжительность строительства которых не превышает одного года, - все изыскательские и проектные работы, необходимые для выполнения полного комплекта рабочих чертежей со сметами для соответствующего строительства; 

б) по предприятиям, зданиям и сооружениям, нормативная продолжительность строительства которых более одного года, - изыскательские и проектные работы, необходимые для выполнения первоочередного комплекта рабочих чертежей, в состав которого входят все рабочие чертежи (со сметами), необходимые для производства строительно-монтажных работ в течение первого года строительства. 

7. Приведенная в нормах продолжительность предусматривает выполнение следующих изыскательских и проектных работ: 

на стадии проектного задания - начиная со срока начала работ, установленного графиком к договору на выполнение проектных и изыскательских работ (при условии получения проектной организацией подписанного заказчиком договора, утвержденного задания на проектирование с необходимыми для проектирования и проведения изысканий исходными данными и подтверждением об обеспечении финансирования работ, оговоренных в договоре), и кончая днем отправки заказчику оформленного и согласованного проектного задания или технического отчета по проведенным изысканиям. В этот период входит, в частности, время, необходимое для сбора и обработки материалов для проектирования, проведения экономических и технических изысканий, изучения местных условий строительства, согласования проектных решений в установленном порядке и др.; 

на стадии рабочих чертежей - начиная со дня получения проектной организацией документов об утверждении проектного задания, о финансировании проектных и изыскательских работ, исходных данных по основному оборудованию, а также подтверждения заказчиком возможности поставки оборудования, предусмотренного проектным заданием, и кончая днем отправки заказчику последних чертежей и смет, из числа входящих в состав полного или первоочередного комплекта рабочих чертежей. 

Время, необходимое для составления и утверждения задания на проектирование, для экспертизы и утверждения проектного задания, а также для его доработки и корректировки по заключению экспертизы или решению утверждающей инстанции, в нормативную продолжительность проектирования не входит и устанавливается дополнительно по согласованию с заказчиком. 

8. Если по несложным объектам проектирование выполняется в одну стадию, то принимается норма на выполнение рабочих чертежей, которая может быть увеличена до 10% по согласованию с заказчиком, но не менее чем на 15 дней. 

9. Продолжительность проектирования расширения или реконструкции предприятий, зданий или сооружений определяется проектной организацией по согласованию с заказчиком проекта путем увеличения или уменьшения нормативной продолжительности проектирования аналогичных новых предприятий, зданий или сооружений в зависимости от намечаемого состава и объема работ по расширению или реконструкции. При этом продолжительность проектирования расширения или реконструкции не должна превышать нормативную продолжительность проектирования соответствующего объекта нового строительства более чем на 20%. 

10. Продолжительность проектирования должна уменьшаться по сравнению с приведенной в нормах при наличии условий, приводящих к сокращению трудоемкости выполнения работ. 

Уменьшение нормативной продолжительности проектных и изыскательских работ, в частности, должно производиться при использовании материалов ранее выполненных изысканий, при отсутствии работ по выбору площадки строительства и при использовании повторно применяемых проектов. 

Размеры уменьшения нормативной продолжительности проектирования устанавливаются по договоренности между заказчиком проекта и проектной организацией. 

11. Нормативная продолжительность проектирования может быть увеличена, по сравнению с установленной настоящими нормами до 10% на стадии проектного задания и до 20% на стадии рабочих чертежей в случаях: 

проектирования в районах вечной мерзлоты; 

проектирования на просадочных грунтах или участках, подработанных горными выработками; 

проектирования в районах с сейсмичностью 7 и более баллов; 

проектирования в районах с наличием оползневых явлений. 

12. Если исходя из сроков разработки проектной документации изыскательские работы по требованию заказчика должны выполняться в зимнее время, а также при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и отдельных неосвоенных районов, то нормативная продолжительность изыскательских работ может быть увеличена по согласованию с заказчиком не более чем на 20%. 

13. Продолжительность проектирования объектов, для которых применение типовых проектов обязательно, в случае получения в установленном порядке разрешения на строительство по нетиповому проекту или по типовому проекту, в который должны быть внесены большие изменения (по договоренности между проектной организацией и заказчиком проекта), может быть увеличена по сравнению с нормативной продолжительностью проектирования соответствующего объекта не более чем на 30%. 

14. Продолжительность проектирования предприятий, зданий и сооружений, не приведенных в нормах, но близких по своему назначению, мощности, объему или другим показателям объектов, может определяться по аналогии с ними по согласованию с заказчиком. 

15. Приостановление выполняемых работ по требованию заказчика или задержка выдачи им исходных данных для проектирования оформляется соответствующими актами. При этом сроки выполнения работ, установленные договорами, соответственно отдаляются. 

16. Время начала проектных и изыскательских работ должно быть увязано с тематическим планом работы проектной организации и назначаться с таким расчетом, чтобы все рабочие чертежи, необходимые для производства строительных и монтажных работ в течение очередного календарного года, были выполнены в срок, установленный настоящими нормами, и выданы заказчику до 1 сентября года, предшествующего началу строительства. 

17. Нормативная продолжительность проектирования нескольких цехов или отделений в одном блоке или корпусе (блокировка) определяется по согласованию с заказчиком проекта путем увеличения нормы для основного (наибольшего) цеха или отделения не более чем на 30%. 

18. Настоящие Общие положения относятся ко всем разделам норм. Указания, приведенные в Общих положениях, обязательны к применению при пользовании каждым из разделов настоящих норм, за исключением случаев, когда в каком-либо из этих разделов оговорен порядок применения норм, отличный от установленного Общими положениями. 

Часть I
 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ, ЭНЕРГЕТИКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

I. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель- ские ра- боты 
	про- ектные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
  
 	Комбинат горнообогатительный в составе: рудника, дробильно-сортировочной или обогатительной и агломерационной фабрики с открытым способом разработки, мощностью по сырой руде      
 	млн. т 
в год 
	До 1 

	10 

	8 

	6 

	11 

  

 	  
 	От 1 до 2,5 

	12 

	9 

	7 

	12 

  

	  
 	От 2,5 до 5 

	14 

	10 

	8 

	13 

  

	  
 	От 5 до 7 

	15 

	11 

	9 

	14 

   

 	  
 	От 7 и более 
   
 	16 
	12 
  
 	10 
	15 

2 
  
 	То же, с подземным способом разработки      
 	млн. т 
в год 
	До 0,5 

	11 

	8 

	6 

	11 

  

 	  
   
 	От 0,5 до 1 

	12 

	10 

	7 

	12 

  

 	  
   
 	От 1 до 2 

	14 

	12 

	8 

	13 

  

 	  
   
 	От 2 до 5 

	16 

	14 

	9 

	14 

  

 	  
   
 	От 5 до 10 

	18 

	15 

	10 

	15 

  

 	От 10 и более 
  
 	20 
    
 	17 
  
 	12 
  
 	16 

3 
  
 	Фабрика обогатительная мощностью по сырой руде      
 	млн. т 
в год 
	До 1 

	6 

	3 

	4 

	10 

  

 	  
   
 	От 1 до 2,5 

	6 

	3 

	4 

	11 

  

 	  
   
 	От 2,5 до 5 

	7 

	3 

	5 

	12 

  

 	  
   
 	От 5 до 10 

	8 

	4 

	6 

	13 

  

 	От 10 и более 

	11 
  
 	4 
  
 	8 
  
 	14 

4 
  
 	Фабрика дробильно-сортировочная мощностью по сырой руде      
 	млн. т 
в год 
	От 0,5 до 1 

	5 

	3 

	3 

	10 

  

 	  
   
 	От 1 до 2,5 

	5 

	3 

	3 

	11 

  

 	  
   
 	От 2,5 до 5 

	6 

	3 

	4 

	12 

  

 	  
   
 	От 5 до 10 

	8 

	4 

	5 

	13 

  

 	От 10 и более 

	9 
  
 	4 
  
 	6 
  
 	14 

5 

 	Завод с полным металлургическим циклом, с выпуском стали 

	млн. т 
в год 
    
 	До 6,5 

 	22 

 	16 

 	10 

 	15 

 	
6 
  
 	Цех коксохимический:

   

 	  

   

 	  

  
 	а) комплекс из 4 коксовых батарей по 65 печей емкостью 30,3 мс углеподготовительным цехом, коксовым блоком и блоком улавливания химических цехов (с конденсацией, сульфатными и бензольными отделениями), с оптимальной мощностью валового кокса (при 6% влажности) 
	млн. т 
в год 

   

   

 	2900 

   

   

      
 	11 

   

   

     
 	5 

   

   

 	7 

   

   

    
 	10 

   

   

   

   
 	б) то же, по 77 печей емкостью 35,5 м 

      
 	3450 
  
 	11 
  
 	5 
  
 	7 
  
 	10 

7 
	Аглофабрики: 

 	  

 	  

   
  
 	а) на 2-4 машины площадью спекания одной машины 
	м
     
 	75 

 	7 

 	4 

 	4 

 	10 

 	

 	б) то же, на 5-8 машин 

 	75 
  
 	8 
  
 	4 
  
 	5 
  
 	11 

  
   
 	в) то же, на 2-6 машин 

   
 	200(250)-312 
  
 	9 
  
 	4 
  
 	6 
  
 	12 

8 
  
 	Доменное производство:

 	  

   

 	  

   

 	а) печь N 1 
	м 
	2000-2700 
	10 
	6 
	6 
	12 

  
 	б) то же, для каждой последующей

  
 	2000-2700 
	5 
	3 
	3 
	7 
	
9 

 	Цех конвертерный (без установок непрерывной разливки стали) с конвертерами 
	т

	100 

 	8 

	4 

	6 

 	8 

 	

	
	250 

	10 

	4   
 
	7  
 
	12 

10 
  
 	Цехи электросталеплавильные с печами   
 	т 
	100 

	6 

	3 

	5 

	8 

	

	200 

	7 

	3 

	6 

	9 

	

	300 

	8 

	3 

	7 

	12 

11 

 	Прокатное производство по II группе сложности 
	-
 	-
 	6 

 	3 

 	4 

 	10 

 	

 	То же, по I группе сложности 

	-
 	-
 	7 
  
 	3 
  
 	5 
  
 	12 

12 

 	Производство стальных труб по II и III группам сложности 
	-
 	-
 	6 

 	3 

 	4 

 	10 

 	

 	То же, по I группе сложности 

	-
 	-
 	8 
  
 	3 
  
 	6 
  
 	12 

13 

   
 	Установки по переработке металлургических шлаков, располагаемые вне доменного цеха:

 	  

 	  

  

 	а) для грануляции, включая очистку ковшей и дробление скардовин
 
	тыс. т 
в год 
  
 	1500 

 	4,5 

 	1 

 	4 

 	8 

 	

   
 	б) для выпуска шлаковой пемзы бассейнового и центробежного типа, включая дробильно-сортировочный комплекс      
 	тыс. м
 в год 
	400 

	3,5 

	1 

	3 

	6 

  

	  
       
 	800 
    
 	4,5 
   
 	1 
   
 	4 
   
 	6 

  
   
 	в) для выпуска литого шлакового щебня 
	  
 	150 

	3,5 

	1 

	3 

	6 

  

 
	  
 	400 
  
 	4,5 
  
 	1 
  
 	4 
  
 	6 

14 
  
 	Заводы и цехи огнеупоров:

 	  

   

 	  

   

   
  
 	а) шамотообжигательный (обжиг сырья во вращающихся печах)
 
	тыс. т в год  
 	От 400 до 600 
   
 	10 

 	8 

 	6 

 	14 

 	

   
   
 	б) шамотных изделий (обжиг сырья во вращающихся печах, прессование изделий полусухим способом)

 	От 200 до 600 

 	10 

     
 	8 

     
 	6 

     
 	12 

     

   
    
 	в) доломитообжигательный (обжиг сырья во вращающихся печах)

 	От 280 до 560 
    
 	10 

 	8 

 	6 

 	12 

 	

   
  
 	г) высокоглиноземистых изделий (обжиг изделий в туннельных печах, прессование полусухим способом)

 	От 50 до 100 

  
 	10 

  
 	8 

  
 	6 

   
 	12 

    

   

    
 	д) смолодоломитовых и смоломагнезитовых изделий (прессование изделий холодным и горячим способом)

 	От 30 до 90 

   
   
 	8 

    
 	6 

   
 
	6 

    
 	10 

   

   

    
 	е) магнезиальных изделий (обжиг сырья во вращающихся и туннельных печах, прессование на гидравлических прессах)

 	От 200 до 400 

 	12 

   
    
 	8 

 
	8 

   
 
	15 

    

   
  
 	ж) магнезитового порошка (обжиг сырья во вращающих печах)

 	От 600 до 1200 
   
 	12 

 	8 

	8 

 	15 

 	

   
     
 	з) молотых материалов и заполнителей для бетонов (помол материалов в турбомельницах)

 	От 100 до 200 

 	8 

    
 	5 

   
 	5 

   
 	10 

    

   
   
 	и) крупных блоков из огнеупорного бетона 

   
   
 	100 

 	8 

 	5 

 	5 

 	10 

 	
15 
  
 	Метизное предприятие в комплексе железопроволочного, сталепроволочного блоков и крепежно-калибровочного цеха 
	тыс. т в год 
	От 1100 до 1400 

	12 
  
 	7 
  
 	7 
  
 	10 

  

 	

   
   
 	От 2000 до 2300
  
 	16 

 	9 

 	9 

 	12 

 	
16 
  
 	То же, блоки и цехи в отдельности 

	объект 
  
 	1 
  
 	9 
  
 	6 
  
 	5 
  
 	8 

17 

   

   
 	Предприятие по переработке вторичных металлов в составе производственных цехов для пакетирования, резки, сортировки, копровой разбивки и брикетирования: 

   

 	  

 	
  
 	II категория 
	тыс. т в год 
	От 200 до 400 
	8 

	3 
	6 
	8 

 	I категория

 	От 400 до 800
 
	10 

	4 

	8 

	9 

18 

   

   

    
 	Предприятие по переработке вторичных металлов в составе производственно-
 разделочного цеха с комплексом сооружений: весов ж.-д., авто- и бытовых; складов ж.-д. и автотранспорта; ремонтного хозяйства (без внеплощадочных сооружений и кислородного хозяйства):

 	  

 	  

  
   
 	III категория 

	тыс. т в год 

	От 10 до 30 

	5 
  
 	3 
  
 	3 
  
 	6 

  
   
 	II категория 

   
 	От 30 до 50 

	6 
  
 	3 
  
 	4 
  
 	7 

  
     
 	I категория 

 	От 50 до 100 
  
 	7 
 
 	3 
 
 	5 
 
 	8 

     
 Распределение цехов прокатного производства по группам сложности 

I группа
 
Непрерывный заготовочный стан 700/500 при катаных или литых блюмсах. 

Непрерывный заготовочный стан 850/700/500. 

Универсальный балочный стан. 

Крупносортный стан 650. 
            
Непрерывные среднесортные станы 450 и 350. 

Полунепрерывный среднесортный стан 350 для качественных сталей. 

Непрерывный штрипсовый стан. 

Непрерывный стан 300. 

Непрерывный мелкосортный стан 250 (двух типов - для выпуска в прутках и в бунтах). 

Непрерывный проволочный стан 250 (четырехниточный до 8 мм). 

Листовые станы 2800; 4200; 4500. 

Непрерывные полосовые станы 1700; 2000; 2200. 

Полунепрерывный полосовой стан 1700. 

Цехи холодной прокатки тонких листов с непрерывными четырехклетьевыми станами кварто 2000-2200 и 1700. 

Цехи холодной прокатки для производства жести с непрерывными пяти-шестиклетьевыми станами кварто 1400. 

Цехи холодной прокатки для производства тонких листов электротехнических сталей с многовалковым станом 1200. 

Одноклетьевой реверсивный стан кварто 1700. 
           
 II группа
 
Обжимные станы - блюминги 1150; 1300 или слябинг 1150. 
           
 Распределение цехов производства стальных труб по группам сложности 

I группа
 
Трубопрокатные цехи горячей прокатки со станами: 140, 250, 400 мм; пильгерстаном от 12 до 24”; непрерывной бесшовной прокатки труб 30-102 мм или агрегатом с трехвалковым раскатным станом 50-200 мм. 

II группа
 
Трубоэлектросварочные цехи со станами: спиральной электродуговой сварки труб 426-1020 или 630-1420 мм; радиочастотной индукционной сварки и сварки сопротивлением 25-114 или 51-220 мм в сочетании с редукционным станом. 

Цехи для производства труб из труднодеформируемого металла с прессами 1600-10000 т. 

Цехи непрерывной печной сварки труб со станом , или 1-4”. 

III группа
 
Трубоэлектросварочные цехи со станами электросварки труб прямым швом 6-15 или 10-32 мм. 

II. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель- ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 

   
 	Рудник по разработке месторождений цветной металлургии открытым способом      
 	тыс. т в год

 	До 1000 

	10 

 	8 

 	6 

   
 	11 

 	

	
	От 1000 до 3000 

	12 

	9 

	7 

	12 

  

 	  

	  

 	От 3000 до 5000 

	14 

	10 

	8 

	13 

	

 	  

 

 	От 5000 до 9000 

	16 
  
 	12 
  
 	10 
  
 	14 

2 
  
 	То же, подземным способом 
	тыс. т в год 
	От 30 до 300 

	12 
  
 	10 
  
 	6 
  
 	11 

  

 

   
 	От 300 до 1000 

	13 
  
 	11 
  
 	7 
  
 	12 

  

 

   
 	От 1000 до 1600 

	14 
  
 	12 
  
 	8 
  
 	13 

3 

   
 	Комбинат горнообогатительный с золотоизвлекательной фабрикой по разработке золоторудных месторождений открытым способом      
 	
	165; 330 
500; 750 
  
 	11 

 
	10 

 
	6 

 
	10 

 

   

 

    
 	500; 660
 1500; 2000 
  
 	11 

 	10 

 	6 

 	12 

 	
4 

   
 	Комбинат горнообогатительный с золотоизвлекательной фабрикой по разработке золоторудных месторождений подземным способом      
 	
	82 
250 

	11 

	10 

	6 

	9 

	

  

   
    
 	160; 250 
500; 750
  
 	12 
  
 	10 
  
 	7 

	11 

	

 	 

 

	  

 	330; 500 
1000; 1500
  
 	13 

 	11 

 	8 
  
 	12 

	

 
	  
 	660 
2000 

	14

 	12 

 	9 

 	13 

 	
5 
  
 	Карьер по разработке россыпных месторождений золота      
 	тыс. м 
	От 50 до 100 

	8 
  
 	6 
  
 	5 
  
 	8 

  

	   
   
 	От 100 до 200 

	9 
  
 	7 
  
 	6 
  
 	9 

  

 

   
 	От 200 до 500 

	9 
  
 	8 
  
 	6 

	  10 

  

	  
 	От 500 до 1000 

	10 
 
 	9 
    
 	8 
	  12 
	
6 

   
 	То же, с применением электрических драг заводского 
изготовления 

	л 

   
 	150; 250; 380 

 	8 

   
 	7 

   
 	5 

   
 	7 

   
 	
7 

   
 	Рудник алмазодобывающий с открытыми работами и алмазоизвлекательной
 фабрикой      
 	 
 	165; 330 
500; 1000 

	11 

 
	10 

	6 

	11 

 

   

 

	  

 	1000 
3000 

	11 
  
 	10 
  
 	6 
  
 	12 

	

 	  

 

   
 	1650 
 5000 

	11 
  
 	10 
  
 	7 
  
 	13 

  

	  
 	3300 
10000 

	15 

 	12 

 	10 

 	14 

 	
8 

 	То же, на россыпи 

	

	75 
500 

	12 

 	8 

	7 

	5 

  

	  
 	150 
1000 
  
 	12 

 	8 

 	7 

 	7 

	
9 
  
 	Фабрика обогатительная цветной металлургии      
 	млн. т в год 
	До 1 

	4 

	 -
 
	4 

	12 

  

 

 	От 1 до 2,5
 
	4 
  
 	-
 
	4 
  
 	14 

  

 

   
 	От 2,5 до 5 

	5 
  
 	-
 
	5 
  
 	16 

 

  

 	От 5 до 10 

	6 
    
 	-
   
 	6 
 
 	20 
	
10 

   

 	Завод алюминиевый в составе: цеха электролиза, цеха анодной массы и других вспомогательных зданий и сооружений 
	серия 
корпус

   
   
 	4 
8

   
   
 	11 

   

 	6 

   

 	7 

   

 	15 

   

 	
11 

   
   
 	Рабочие чертежи основных цехов алюминиевого завода, состоящего из 4 серий 
(8 корпусов):

   

   

   

 	  

   

   

   

   

 	  

   

  

 	электролиза с межкорпусным хозяйством;
 
	объект 

 	1

 	-

 	-

 	-

 	12 

 	

   

 	электролитейный для обслуживания 4-серийного цеха электролиза со складом готовой продукции;

   

 	  1 

 	  -

 	  -

 	  -

 	6 

 	

   
 	анодной массы для нужд цеха электролиза со складскими помещениями        

   
 	1

	-

	-

	-

	6

	

Примечания: 1. Настоящие нормы для рудников составлены на следующие условия сложности: 

а) рельеф местности с уклоном до 2%; 

б) обводненность месторождения нормальная (с притоком воды до 500 м в час); 

в) месторождение, не опасное по силикозу и самовозгоранию руды и пород. 

В случае изменения перечисленных условий нормативная продолжительность проектирования может быть увеличена по согласованию с заказчиком: 

а) при предгорном рельефе местности с уклоном от 2 до 9% - до 1,2; 

б) при горном рельефе местности с уклоном более 9% - до 1,3; 

в) при притоке воды в рудники от 1500 до 3000 м в час - до 1,15; 

г) при притоке воды в рудники от 3000 до 6000 м в час - до 1,2; 

д) при притоке воды в рудники более 6000 м в час - до 1,3. 

2. Продолжительность проектирования только золото- или алмазоизвлекательной фабрики на стадии проектного задания составляет 50% нормы на проектные работы всего комплекса. 

                   
 
III. УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Коли-
 чество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ
  
 	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 

 	Шахта без обогатительной фабрики 
	
	900 
3000 

	5,5 

	1,5 

	5,5 

	7 

	

 

	  
 	1200 
4000
 
	6 
	1,5 
	6 
	7 

 	  

 	1500 
5000 

	6,5 
	1,5 
	6,5 
	7 

 	  

 	1800 
6000 

	7 
	2 
	7 
	8 

 	  

 	2400 
8000
 
	7,5 
	2 
	7,5 
	8 

 	  

 	3000 
10000
 
	8 
	2 
	8 
	8 
	
2 
	Карьер 
	
	3000 
10000
 
	8 
	4 
	5 
	12 

 	  

   
 	4500 
15000
 
	9 
	4 
	6 
	13 

 	  

 	6000 
20000
 
	10 
	5 
	6 
	14 

 	  

 	9000 
30000 

	12 
	6 
	7 
	15 
	
3 

   
 	Фабрика обогатительная для коксующихся углей (центральная или групповая)     

 	1500 
300 

	7 

  
 	3 

  
 	5 

  
 	10 

  

	
	
	2400 
450 

	8 

	4 

	5 

	11 

  

	  
 	3000 
600
 
	10 
	5 
	6 
	11 

 	  

 	4800 
900 

	11 
	6 
	6 
	12 
	
4 
	То же, для энергетических углей 
	
	1500 
300 

	6 
	3 
	4 
	9 

 	  

   
 	2400 
450
 
	7 
	4 
	4 
	10 

 	  

 	3000 
600
 
	9 
	5 
	5 
	11 

 	  

 	4800 
900 
	10 
	6 
	5 
	12 

Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования приведена для шахт и карьеров, без обогатительных фабрик, с установками для механизированной выборки породы. 

2. Нормативная продолжительность проектирования при наличии усложняющих факторов по согласованию с заказчиком может быть увеличена: 

а) в случае устройства проветривания при сверхкатегорийности по газу до 1,1; 

б) при устройстве кондиционирования воздуха для проветривания до 1,15; 

в) при наличии водоносных горизонтов, требующих разработки специальных мероприятий, до 1,05; 

г) при разработке более четырех пластов до 1,1; 

д) при закладке выработанного пространства до 1,05. 

IV. НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

															
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица изме- рения 
	Количе-
 ство 
	Нормы продолжительности проектно-изыскательских работ (в месяцах)

	

	на стадии проектного задания 

	

	
	
	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 

 	Сбор нефти и газа на нефтяном месторождении со скважинами всех способов эксплуатации при числе нефтесборочных      
 	шт.
 шт.
   
 	 До 3   
 До 160 

	5,5 

	2 

	4 

	5 

	

   

   

 
 	6,5 

	2,5 

	5 

	6 

 	

 	  

 	7,5 

 	3 

 	6 

 	7 

 	
2 
  
 	Центральный нефтепромысловый резервуарный парк     
 	тыс. м 
	До 20 

	2,5 

	1 

	2 

	3 

  

   

 	От 20 до 40 

	3 

	1 

	2,5
  
 	3 

  

 	  
   
 	От 40 до 70 

	4 

	1,5 

	3 

	4 

  

   
 	От 70 до 100 

	4,5 
  
 	1,5 
  
 	3,5 
  
 	4 

3 
  
 	Промысловая нефтенасосная станция 
	тыс. м
 в сутки  
 	До 10 

	2,5 

	0,5 

	2 

	2,5 

  

 	  
 	От 10 до 30 

	3 

	0,5 

	2,5 

	3 

  

   
 	От 30 до 50 
  
 	3,5 
  
 	0,5 
  
 	3 
  
 	3,5

4 
  
 	Дожимная нефтенасосная станция 
	тыс. м 
в сутки 
	До 2 

	2 

	0,5 

	1,5 

	2,5 

 	  

 	От 2 до 5 
  
 	2,5 
  
 	0,5 
  
 	2 
  
 	2,5 
	
5 
  
 	Промысловая компрессорная станция 
	тыс. нм
 в сутки   
 	До 300 

	3,5 

	0,5 

	3 

	4 

  

	 
   
 	От 300 до 500 
  
 	4,5 
  
 	0,5 
  
 	4 
  
 	5 

6 

 	Внутрипромысловые напорные газопроводы и нефтепроводы 
	км 

 	До 50 

 	2,5 

 	1 

 	2 

 	4 

 	

	
	От 50 до 100 

	3,5 

	1,5 

	2,5 

	4,5 

7 
  
 	Установка для эжектирования газа 
	тыс. нм
  в сутки
 
	100 
  
 	3,5 
  
 	0,5 
  
 	3 
  
 	3,5 

	
8 
  
 	Установка для обезвоживания нефти с применением электрического метода 
	млн. т в год 
	До 1 

	3 

	0,5 

	3 

	5 

  

	  
   
 	От 1 до 2 

	3 

	0,5 

	3 

	6 

  

   

 	От 2 до 3 

	4 

	0,5 

	4 

	7 

  

 	От 3 до 6
  
 	4,5 
  
 	1 
  
 	4 
  
 	7 

9 

  
 	Установка обезвоживания и обессоливания нефти термохимическим способом под давлением 
	млн. т в год 

 	До 2 

   
 	3 

   
 	0,5 

    
 	3 

 
	4 

   
 	
10 
  
 	Установка обессоливания нефти и стабилизации нефти 
	млн. т в год 
	До 2 

	3,5 

	0,5 

	3 

	5 

  

	  
   
 	От 2 до 3 
  
 	4,5 
  
 	0,5 
  
 	4 
  
 	6 

11 
  
 	Комплексная установка по подготовке нефти 
	млн. т в год 
	До 3 

	4,5 

	0,5 

	4 

	6 

  

   

   
 	От 3 до 6 
  
 	6 
  
 	1 
  
 	5,5 
  
 	7 

12 
  
 	Газопроводы диаметром до 500 мм с компрессорными станциями, всеми зданиями и сооружениями 
	км 
  
 	От 300 до 500 
  
 	6 
  
 	4 
  
 	5 
  
 	9 

  

   

   
   
 	От 500 до 1000 
    
 	9 

	6 

   
 	8 

 	10 

   
 	
13 
  
 	То же, диаметром от 500 до 1000 мм 
	км 
  
 	От 300 до 500
  
 	6 

	4 

	5 

	10 

  

 
	  
 	От 500 до 1000
 
	9 
  
 	6 
  
 	8 
  
 	10 

14 
  
 	Газопроводы и ответления диаметром до 1000 мм без компрессорных станций, со всеми остальными зданиями и сооружениями 
	км 
  
 	До 100 

	2,5 

	2
  
 	2 

	4 

  

	  
   
 	От 100 до 200
  
 	3 

	2 

	2,5 

	5 

  

 	  
    
 	От 200 до 300
  
 	3,5 

	2,5 

	3 

	6 

  

   
 	От 300 до 400 

	4,5 
	3 
	4 
  
 	7 
	
15 
  
 	Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром до 500 мм с насосными станциями, всеми зданиями и сооружениями 
	км 
  
 	От 300 до 500
  
 	6 

	5 

	5 

	9 

  

   

   

 	От 500 до 1000 

	9 

     
 	7 

   
 	7,5 

  
 	10 

 	
16 
  
 	То же, диаметром от 500 до 1000 мм 
	км 
  
 	От 300 до 500
  
 	6 

	5 

	5 

	10 

  

 
	  
 	От 500 до 1000 

	9 
  
 	7 
  
 	8 
  
 	10 

17 
  
 	Нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и ответвления от них диаметром до 300 мм без насосных станций, со всеми зданиями и сооружениями 
	км 
  
 	До 100 

	2,5 

	2 

	2 

	4 

  

 	  
   
 	От 100 до 200
  
 	3 

	2 

	2,5
  
 	5 

  

   
 	От 200 до 300 
	3,5   
      
 	2,5 
    
 	3 
   
 	6 

18 
  
 	То же, диаметром от 300 до 700 мм 
	км 
  
 	До 100 

	2,5 

	2 

	2 

	4 

  

	  
   
 	От 100 до 200
  
 	3 

	2 

	2,5 

	5 

  

 

	  
   
 	От 200 до 300
  
 	3,5 

	2,5 

	3 

	6 

  

	  
 	От 300 до 400 
  
 	5,5 
  
 	3,5 
  
 	4,5 
  
 	7 

19 
  
 	Компрессорная станция магистральных газопроводов, мощностью компрессоров 
	тыс. кВт 

	До 10 

	4 

	2 

	3,5 

	5 

  

 

 	От 10 до 25 

	4,5 

	2 

	4 

	5,5 

  

  

   
 	От 25 до 50 

	5 

	2 

	4,5 

	6 

  

	   
 	От 50 до 90 
	6
   
 	2 
  
 	5,5 
  
 	7 

20 

   
   
 	Газораспределительная станция (ГРС) автоматизированная при входном давлении 10 кг/см 

	тыс. м 

 	До 200 

    
 	2 

   
   
 	1 

   
   
 	1,5 

   
   
 	2,5 

   

21 
  
 	Головная перекачечная насосная станция нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с резервуарным парком      
 	млн. т в год 
	До 13 

	3,5 

	2 

	2,5 

	5 

  

 	  
   
 	От 13 до 20 

	4 

	2 

	3 

	5 

  

 	  
   
 	От 20 до 28 

	4,5 

	2 

	3,5 

	6 

  

   
 	От 28 до 48 
 
 	6 
	2,5 
	5 
  
 	6 
	
22 
  
 	Промежуточная перекачечная насосная станция нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 
	млн. т в год 
	До 13 

	3 

	2 

	2
  
 	4 

  

 

 	От 13 до 20
  
 	3,5 

	2 

	2,5 

	4 

  

   

 	От 20 до 28
  
 	4 

	2 

	3 

	5 

    

 	От 28 до 48 
	5    
 	2,5       
 	4    
 	5,5  

Примечания: 1. При протяженности магистральных трубопроводов с компрессорными (насосными) станциями менее 300 км продолжительность изысканий и проектирования сокращается на каждые 50 км уменьшения протяженности на 10%. 

2. Нормативная продолжительность проектирования может быть увеличена по согласованию с заказчиком: 

           а) для нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и насосных станций при последовательной перекачке трех и более сортов - до 1,1; 
           б) для нефти и нефтепродуктов с температурой застывания выше 10 °С и нефтей вязкостью при 0 °С выше трех Стоксов по: 
           магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам - до 1,3; 
           головным и промежуточным насосным станциям - до 1,1. 
3. Продолжительность изысканий и проектирования участков магистральных трубопроводов, прокладываемых в заболоченных и обводненых местностях, может быть установлена по согласованию с заказчиком при общей длине обводненных и заболоченных участков: 

от 
	5
 
	до 
	10%
 	
	до 
	1,05 
	
"
 	10
 
	"
 	15%
 	
	до 
	1,1 
	
"
 	15
 
	"
 	20%
 	
	до 
	1,15 
	
"
 	20
 
	и 
	более 

 	
	до 
	1,2 
	
23 
  
 	Нефтеперерабатывающий завод со средними и укрупненными установками по топливной и топливно-масляной схеме производства с вторичными процессами мощностью нефти 
	млн. т в год 
	 До 3
 
	10 

	4,5 

	9 

	7 

  

	  
 	От 3 до 6
 
	11 

	5,5 

	10 

	7,5 

  

	  
 	От 6 до 12
 
	12 

	6,5 

	11 

	8 

   

 	  
 	От 12 до 18 

	13 
    
 	8 
    
 	12 
    
 	9 

24 

 	Электрообессоливающая установка типа 10-6 мощностью нефти 
	млн. т в год 
   
 	2 

 	4 

 	-

	4 

 	6 

 	
25 

 	Атмосферная трубчатая установка со вторичной перегонкой 
	млн. т в год 
   
 	3; 6 

 	4 

 	-

	4 

 	7 

 	
26 

 	Установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти 

	млн. т в год 
  
 	3 

 	6 

 	-

	6 

 	9 

 	
27 
  
 	То же, типа 11-3 

	млн. т в год 

	6
   
 	8 
  
 	-
 
	8 
  
 	12 

28 

   
 	Установка типа 22-4 вторичной перегонки бензина мощностью фракции НК-180 
	тыс. т в год 

 	1100 

   
 	4 

   
 	-

	4 

   
 	7 

   
 	
29 

   
  
 	Комбинированная установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти со вторичной перегонкой с ЭЛОУ и без ЭЛОУ 

	млн. т в год 

    
 	3 

   
    
 	7 

   
    
 	-

	7 

   
   
 	10 

   

30 

 	Установка термического крекинга типа 15-5 мощностью мазута 
	тыс. т в год 
   
 	450 

 	6 

 	-
 
	6 

 	8 

 	
31 

 	Установка визбрекинга типа 15-6 мощностью полугудрона 
	млн. т в год 
  
 	2 

 	7 

 	-

	7 

 	10 

 	
32 

   
 	Установка каталитического крекинга вакуумного отгона с порошкообразным катализатором типа 1-А 
	тыс. т в год 

 	750 

    
 	7 

 
	-

	7 

    
 	10 

    
 	
33 

 	Установка каталитического крекинга типа 43-103 мощностью вакуумного дистиллята 
	тыс. т в год 
    
 	1500 

 	10 

 	-
 	10 

 	12 

34 

  
 	Установка непрерывного коксования в необогреваемых камерах типа 21-10 мощностью полугудрона 
	тыс. т в год 

 	300 

   
 	6 

     
 	-
 
	6 

     
 	10 

    
 	
35 

	Установка по переработке тяжелых нефтяных остатков типа Г-18-2 
     
 	млн. т в год 
 
 	1 

 	6 

 	-
 
	6 

 	10 

 	
36 

 	Установка каталитического риформинга для улучшения качества автобензина 
	тыс. т в год 
   
 	300 

 	7 

	-
 	7 

 	10 

 	
37 
  
 	Установка ароматизации 
	тыс. т в год 
	300 

 	7 
  
 	-
 
	7 
  
 	10 

38 
   
 	Установка каталитического риформинга для получения ароматики 
	тыс. т в год 
  
 	300 

 	4,5   
 	-
 	4,5 

 	7 

 	
39 

 	Установка полимеризации пропанпропиленовой фракции 
	тыс. т в год 
  
 	100 

 	6 

 	-

	6 

 	7 

 	
40 

  
 	Установка сернокислотного алкилирования типа 25-6 мощностью бутанбутиленовой фракции 
	тыс. т в год 

 	90 

  
 	5,5 

   
 	-
 
	5,5 

  
 	10 

    
 	
41 

 	Установка карбамидной очистки дизельных топлив типа 64-1 
	тыс. т в год 
    
 	484 

 	8 

 	-
 
	8 

 	10 

 	
42 

 	Установка плюмбитной очистки типа 33-1 мощностью топлива ТС 
	млн. т в год 
   
 	2 

 	4 

 	-
 	4 

 	6 

 	
43 

 	Установка гидроочистки дизельных топлив 
	тыс. т в год 
  
 	900 

 	8 

 	-

	8 

 	10 

 	
44 

 	Установка каталитического риформинга с предварительной гидроочисткой 
	тыс. т в год 
  
 	300 

 	7 

 	-
 
	7 
	10 

 	

	
	600 

	8 

	-
 	8 

	11 

45 

  
 	Установка сероочистки газомоноэтаноламином типа 30-30 мощностью сухого сернистого газа 
	тыс. т в год 

 	35 

   
 	4 

    
 	-

	4 

    
 	6 

  
 	
46 

 	 Газофракционирующая установка одноблочная 
	тыс. т в год 
  
 	400 

 	5 

 	-

	5 

 	8 

 	
47 
  
 	Установка инертного газа 
	тыс. м
 в час 
  
 	2 
  
 	3 
  
 	-
 
	3 
  
 	4 

48 

   

  
 	Комбинированная установка типа ГК-3, заменяющая комплекс пяти установок: АВТ - 3 млн.; вторичной перегонки бензина - 400 кг; каталитического крекинга 1-А -750 тыс. т; 2 установки термического крекинга по 500 тыс. т 
	млн. т в год 

   

 	3 

   

    
 	7 

   

   
 	-

	7 

   

 	12 

   

 	
49 
  
 	То же, типа ГК-6 
  
 	млн. т в год 

	6 
  
 	7 
  
 	-
 
	7 
  
 	12 

50 

 	Комбинированная установка атмосферной перегонки и контактного коксования 
	млн. т в год 
    
 	3 

   
 	9 

   
 	-
 
	9 

 
	12 

   
 	
51 

  
 	Установка вакуумной перегонки масел типа 44-3 мощностью масляных дистиллятов 
	тыс. т в год 

 	120 

   
 	4 

  
 	-
 
	4 

  
 	6 

 	
52 

 	Установка деасфальтизации типа 
36-4 мощностью гудрона 
	тыс. т в год 
   
 	600 

 	5 

 	-
 
	5 

	10 

 	
53 

 	Установка селективной очистки масел типа У-37/2 
	тыс. т в год 
  
 	90 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
54 

   
  
 	Установка селективной очистки масел фенолом типа А-37/3 мощностью дистиллятного сырья
 остаточного сырья 
	тыс. т в год 

   
 	625 
325 

    
 	6 

   
   
 	-

	6 

   
  
 	9 

   

55 

 	Установка селективной очистки масел фурфуролом типа Г-37 
	тыс. т в год 
   
 	600 

 	6 

 	-
 
	6 

 	8 

 	
56 

 	Установка деасфальтизации и селективной очистки типа Г-36/37 
	тыс. т в год 
    
 	6000 

 	5 

 	-

	5 

 	10 

 	
57 

 	Установка депарафинизации масел типа 39-7 
	тыс. т в год 
  
 	240 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
58 

 	Установка глубокой депарафинизации масел типа 39-8 
	тыс. т   
   
 	60 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
59 

 	Установка депарафинизации масел в карбамидном растворе 
	тыс. т 

 	150 

 	6 

 	-
 
	6 

 	10 

 	
60 

 	Установка контактной очистки масел типа 42-3 
	тыс. т 

 	От 250 до 330  
 	3,5 

 	-

	3,5 

 	6 

 	
61 

 	Установка адсорбционной очистки масел типа 65-1 
	тыс. т 

 	60 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
62 
  
 	Цех консистентных смазок 
	тыс. т 
  
 	10 
  
 	6 
  
 	-
 
	6 
  
 	10 

63 

 	Установка обезмасливания гача типа 40-2 
	тыс. т 

 	От 80 до 160 
    
 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
64 

 	Установка адсорбционной очистки жидких парафинов типа 56-3 
	тыс. т 

 	32 

 	7 

 	-
 
	7 

 	10 

 	
65 

    
 	Установка адсорбционной очистки твердых парафинов типа 56-4 мощностью очищенных парафинов 
	тыс. т в год 

 	43 

     
 	6,5 

     
 	-

	6,5 

     
 	  9

   
 	
66 

 	Парафиновый цех без селективной очистки 
	объект 

 	1 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
67 
  
 	Битумная установка типа 19-3 
	тыс. т в год 
	От 200 до 300 
  
 	3 
  
 	-
 
	3 
  
 	6 

68 

 	Установка НЧК мощностью по готовому 25% НЧК 
	тыс. т в год 
  
 	12 

 	3 

 	-

	3 

 	6 

 	
69 

 	Цех функциональных алкилфенольных присадок 
	тыс. т в год 
  
 	7 

 	6 

 	-

	6 

 	10 

 	
70 

     
 	Этилосмесительная установка (вариант с бочками) мощностью по авиабензину или автобензину
 
	тыс. т в год 

 	От 300 до 600 
    
 	3 

    
 	-

	3 

   
 	4 

    
 	
71 

 	То же (вариант с цистернами), на одном потоке или на трех потоках
 
	тыс. т в год 
    
 	От 1000 
до 3000 
   
 	4 

 	-
 	4 

 	5 

 	
72 

 	Установка смешения масел в составе завода с переработкой нефти на масла
 
	тыс. т в год 
   
 	2000 

 	4 

 	-

	4 

 	5 

 	
73 

 	Установка рафинированных акиларилсульфонатов
 
	тыс. т в год 
  
 	20 

 	5 

 	-

	5 

 	8 

 	
74 

 	Установка окисления мягких парафинов (СЖК)
 	объект 

 	1 

 	7 

 	-

	7 

 	10 

 	
75 

    
 	Катализаторная фабрика производства
 синтетического катализатора с выпуском готового катализатора
 
	тыс. т в год 

 	9 

     
 	5 

    
 	-

	5 

     
 	9 

     
 	
76 

 	Катализаторная фабрика производства 
катализатора из глин с выпуском готового катализатора      
 	тыс. т в год 
  
 	10 

 	5 

 	-

	5 

 	9 

 	

Примечание. Нормативная продолжительность проектирования при высоком горизонте грунтовых вод увеличивается на коэффициент до 1,1 по согласованию с заказчиком. 

77 
	Нефтебаза железнодорожная 
	тыс. м 
	До 6 

	4 
	1,5 
	3 
	3 

 	  
 	  
 	От 6 
до 30 

	4,5 
	2 
	3,5 
	5 

 	  
 	  
 	От 30 до 100 

	6 
	2,5 
	5 
	7 

 	  
 	  
 	От 100 до 200 

	8 
	3,5 
	6 
	9 

          
 V. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 

   
 	Завод по производству жидких азотных удобрений на базе конверсии природного газа 

	млн.
 руб.

 	18-20*
 11-20 

 	8 

   
 	4 

   
 	8 

   
 	8 

   

   
 	а) производство аммиака 

	тыс. т 
  
 	100 
  
 	6 
  
 	2 
  
 	6 
  
 	6 

  
   
 	б) производство аммиачной воды 

 	400 
  
 	4 
  
 	1 
  
 	3 
  
 	4 

2 

     
 	Завод по производству твердых азотных удобрений на базе конверсии природного газа 

	млн. руб.

    
 	22-24*
 12-13 

 	9 

   
 	4 

  
 	9 

   
 	9 

     

   
 	а) производство аммиака 

	тыс. т 
  
 	100 
  
 	7 
  
 	2 
  
 	6 
  
 	7 

  

   
 	б) производство синтеза мочевины с полным жидкостным рециклом 

   
   
 	180 

   
 	5 

   
 	2 

   
 	5 

   
 	6 

   
 	
3 

   
 	Завод по производству твердых азотных удобрений на базе конверсии природного газа 

	млн. руб.

   
 	43-47*
 24-26 

 	10 

   
 	5 

   
 	10 

    
 	10 

    

   
 	а) производство аммиака 

	тыс. т 
  
 	200 
  
 	8 
  
 	3 
  
 	8 
  
 	9 

  

 	б) производство слабой азотной кислоты 

   
   
 	360 

 	7 

 	2 

 	7 

 	8 

 	

 	в) производство аммиачной селитры 

   
 	450 
  
 	6 
  
 	2 
  
 	6 
  
 	7 

4 

   
     
 	Завод по производству твердых азотных удобрений на базе коксового газа методом глубокого холода 

	млн. руб.

   
  
 	37-41*
 5-17 

     
 	10 

   
    
 	5 

   
    
 	10 

   
    
 	10 

   

  
   
 	а) производство аммиака 

	тыс. т 
  
 	210 
  
 	8 
  
 	3 
  
 	8 
  
 	9 

  

 	б) производство слабой азотной кислоты 

   
   
 	360 

 	7 

 	2 

 	7 

 	8 

 	

 	в) производство аммиачной силитры

   
 	350 
  
 	6 
  
 	2 
  
 	6 
  
 	7 

  
   
 	г) производство этилбензола 

   
 	42 
  
 	5 
  
 	2 
  
 	4 
  
 	6 

5 

     
 	Производство метанола на базе конверсии природного газа (в составе комбината)
 	тыс. т 

    
 	100 

    
 	8 

    
 	4 

   
 	7 

   
 	9 

     
 	
6 

   

   
  
 	Завод по производству капролактама по схеме окисления циклогексогена воздухом - 22 тыс. т, адипиновой кислоты - 9 тыс. т, сульфат-аммония - 120 тыс. т (в составе комбината) мощностью 
	млн. руб.
 в год 

   

   
 	24-27*
 15-17 

   

      
 	9 

   

   
    
 	4 

   

   
    
 	9 

   

   
    
 	9 

   

   

7 

   
 	Производство ацетилена по схеме термокислотного пиролиза метана 
	тыс. т 

   
 	35 

   
 	8 

   
 	3 

   
 	8 

   
 	8 

   
 	
8 

 	Завод по производству ацетатного или триацетатного шелка      
 	тыс. т 

 	13,6 

 	6 

 	3 

 	5 

 	6 

 	

	
	20 

	8 

	3 

	6 

	8 

9 
  
 	Завод по производству вискозного шелка      
 	тыс. т 
 
 	10 
  
 	6 
 
 	3 
  
 	5 
  
 	6 

	

	20 

	8 

	3 

	6 

	8 

10 
   
 	Завод по производству вискозного штапеля      
 	тыс. т 
  
 	42 
  
 	7 
  
 	3 

	5 

	7 

	
	
	84 

	8 

	3 

	7 

	8 

11 

 	Завод по производству капронового корда 
	тыс. т 

 	30 

 	8 

 	3 

 	7 

 	8 

 	
12 

 	Завод по производству капронового шелка 
	тыс. т 

 	15 

 	8 

 	3 

 	7 

 	8 

 	
13 
   
 	Завод по производству штапельного волокна - лавсан      
 	тыс. т 
    
 	18 
  
 	7  
 	3 
  
 	5 
  
 	7 

	

	50 

	8 

	3 

	7 

	8 

14 
    
 	Завод по производству штапельного волокна - нитрон      
 	тыс. т 
    
 	18 
  
 	7 
  
 	3 
  
 	5 
  
 	7 

	

	50 

	8 

	3 

	7 

	8 

15 

 	Завод по производству хлора и хлороорганического синтеза 
	млн. руб.
   
 	50*
 38 

	8 

	3 

	7 

	7 

	

   

 	  

 	80*
 55 

	9 

 	3 

	8 

	9 

	

 	  

 	110*
 80 

	10 

 	3 

 	10 

 	10 

 	
16 

 	Комбинат по производству хлора и хлорорганического синтеза 
	млн. руб.
   
 	150*
 115 

	12 

 	4 
  
 	12 
  
 	12 

  

 	  

	  

 	200*
 150 

	  14

 	  5 

 	  14 

 	  14 

 	

 	  

 

 	320*
 200 

	16 

	6 

	16 

	15 

17 

 	Производство окиси этилена методом прямого окисления этилена      
 	тыс. т 

 	30 

 	7 

 	3 

 	7 

 	9 

 	

	
	60 

	8 

	3 

	8 

	10 

18 

 	Производство хлора и каустической соды диафрагменным методом      
 	тыс. т 

 	60 

 	7 

 	3 

 	7 

 	9 

 	

	
	120 

	8 

	3 

	8 

	10 

19 

 	Производство хлора и каустической соды ртутным методом 
	тыс. т 

 	100 

 	8 

 	3 

 	8 

 	10 

 	
20 

 	Производство полихлорвиниловой смолы суспензионным методом 
	тыс. т 

 	28 

 	6 

 	3 

 	6 

 	8 

 	

	
	60 

	8 

	3 

	8 

	10 

21 

 	Производство полихлорвиниловой смолы латексным методом      
 	тыс. т 

 	36 

 	6 

 	3 

 	6 

 	8 

 	

	
	60 

	8 

	3 

	8 

	10 

22 

 	Производство капролактама из фенола 
	тыс. т 

 	22 

 	8 

 	3 

 	8 

 	10 

 	
23 

   
 	Комбинат по производству шин, резинотехнических и асбестотехнических изделий 
	млн.
 руб.

 	115*
 60 

 	10 

    
 	5 

    
 	10 

    
 	10 

     
 	
24 

 	Комбинат по производству шин и резинотехнических изделий 
	млн.
 руб.
    
 	90*
 46 
    
 	9 

 	4 

 	9 

 	9 

 	
25 

 	Завод по производству асбестотехнических изделий 
	млн.
 руб.
   
 	15*
 9 
  
 	7 

 	4 

 	6 

 	6 

 	
26 

 	Завод по производству губчатых изделий 
	тыс. т 

 	3-3,5 

 	5 

 	2 

 	4 

 	3 

 	
27 
  
 	Завод по производству сажи в том числе: 
	тыс. т 
  
 	64-82 
  
 	6 
  
 	3 
  
 	6 
  
 	6 

  
 	сажи ПМ-70 
	 
 	20-40 
	5 
	2 
	4 
	4 

 	сажи ПМ-50 
	 
 	24-48 
	5 
	2 
	4 
	4 

 	сажи “Ригал” 
	 
 	14 
	5 
	2 
	4 
	4 
	
28 

   
 	Завод по производству резинотехнических изделий в том числе:
 
	млн. руб.

 	40*
 21 
    
 	7 

   
 	3 

   
 	7 

   
 	8

   

   
   
 	а) производство формовых и неформовых изделий 

	тыс. т 

 	7-10 

 	5 

 	2 

 	4 

 	4

 	

 	б) производство рукавов 
	млн. м 
  
 	15 
  
 	5 
  
 	2 
  
 	4 
  
 	4

  
   
 	в) производство вентиляторных ремней 

	тыс. шт.
   
 	5000 
  
 	5 
  
 	2 
  
 	4 
  
 	4

  
   
 	г) производство клиновидных ремней 

	тыс. усл.
 единиц 
	6500 
  
 	5 
  
 	2 
  
 	4 
  
 	4

  

 	д) производство транспортных лент 

	тыс. м 
прокладки
  
 	10 

 	5 

 	2 

 	4 

 	4

 	

 	е) производство плоских приводных ремней 
	то же 
  
 	8-10 
  
 	5 
  
 	2 
  
 	4 
  
 	4

29 
	Завод по производству регенерата 
	тыс. т 
	15 
	4 
	2 
	4 
	4 
	
30 
	Завод по производству шин 
	тыс. шт.
 	3000-3500 
	9 
	5 
	8 
	7 
	
31 
	Завод лакокрасок малой мощности 
	млн. руб.
 	5*
 4
 
	5 
	2 
	4 
	5 
	
32 
	Завод лакокрасок средней мощности 
	млн. руб.
 	10*
 8
 
	6 
	3 
	5 
	6 
	
33 
	Завод лакокрасок большой мощности 
	млн. руб.
 	20 
	8 
	3 
	7 
	7 
	
34 
	Производство лаков на конденсационных смолах 
	тыс. т 
	30 

	6 
	3 
	5 
	7 

 	

 	60 

	6 
	3 
	5 
	8 
	
35 
	Производство эмалей на конденсационных смолах      
 	тыс. т 
	25 

	5 
	3 
	4 
	6 

 	

 	50 
	5 

	3 
	4 
	7 
	
36 
	Производство лаков и эмалей на полимеризационных смолах      
 	тыс. т 
	20 

	6 
	3 
	5 
	7 

 	 

 	40 

	6 
	3 
	5 
	8 
	
37 
	Производство эмульсионных латексных красок     
 	тыс. т 
	10 

	4 
	3 
	3 
	4 

 	 
 	  
 	25 
	5 
	3 

	4 
	5 
	
38 
	Комбинат по производству синтетического каучука и продуктов органического синтеза   
 	млн. руб.
 	38*
 20 
	7 
	3 
	7 
	6 

 	 

 	55*
 38
 
	8 
	3 
	8 
	7 

 	  

 	65*
 38
 
	9 
	3 
	9 
	9 

 	  
 	  
 	105*
 65
 
	9 
	3 
	9 
	10 

 	  
 	  
 	150*
 110
 
	11 
	4 
	10 
	11 

 	  
 	  
 	200*
 130 

	12 
	5 
	11 
	12 
	
39 
	Производство бутилкаучука (включая производство изобутилена дегидрированием изобутана) 
	млн.
 руб.
 	37*
 18 
	7 
	4 
	6 
	8 
	
40 
	Производство СКИ 
	млн. руб.
 	69*
 35 

	8 
	4 
	7 
	9 
	
41 
	Производство дивинила 
	млн. руб.
 	50*
 28
 
	8 
	4 
	7 
	9 
	
42 
	Производство СКД 
	млн. руб.
 	38*
 24 

	7 
	4 
	6 
	8 
	
43 
	Производство ацетальдегида 
	млн. руб.
 	20*
 13 

	5 
	3 
	5 
	8 
	
44 
	Производство этилена 
	млн. руб.
 	30*
 18 

	6 
	4 
	5 
	7 
	
45 
	Производство латекса 
	млн. руб.
 	15*
 10 

	5 
	3 
	4 
	8 
	
46 
	 Газофракционирующие установки 
	млн. руб.
 	18*
 12 
	5 
	3 
	4 
	8 
	
47 
	Завод для получения серы с добычей руды 
	млн. руб.
 	80*
 55
 
	10 
	4 
	10 
	10 

 	  
 	  
 	200*
 120 

	12 
	5 
	12 
	12 
	
48 
	Комбинат по добыче и переработке калийных солей 
	млн. руб.
 	60*
 46
 
	8 
	3 
	8 
	8 
	
49 
	Комбинат по добыче и переработке фосфоритных руд 
	млн. руб.
 	20*
 12
 
	8 
	3 
	8 
	7 

 	  

 
	  
 	30*
 18 

	9 
	4 
	9 
	8 
	
50 
	Горнохимический комбинат по добыче и комплексному обогащению фосфоритных и нефелиновых руд 
	млн. руб.
 	90*
 70 
	10 
	4 
	10 
	10 
	
51 
	Завод по переработке пластических масс в изделия 
	млн. руб.
 	20*
 10
 
	6 
	2 
	5 
	6 

 	  

 	30*
 14 

	7 
	2 
	6 
	8 
	
52 
	Завод по производству пленок 
	млн. руб.
 	20*
 10 

	7 
	2 
	6 
	8 
	
53 
	Завод по производству пластмассовых труб 
	млн. руб.
 	11,5*
 5,3 

	7 
	2 
	6 
	8 
	
54 
	Завод по производству фенолоформальдегидных смол и пресспорошков 
	млн. руб.
 	5*
 3 
	7 
	2 
	6 
	8 
	
55 
	Завод по производству карбамидных смол и формалина для него 
	тыс. т 
	40 
	8 
	3 
	8 
	8 
	
56 
	Завод по производству ацетилцеллюлозы 
	тыс. т 
	15 
	8 
	3 
	8 
	8 
	
57 
	Завод по производству полистирола      
 	тыс. т 
	20 

	6 
	3 
	5 
	7 

 	     
 	  
 	40 

	7 
	3 
	6 
	8 
	
58 
	Завод по производству полиэтилена низкого давления 
	тыс. т 
	24 
	7 
	3 
	6 
	8 
	
59 
	Завод по производству красителей и полупродуктов 
	млн. руб.
 	40*
 25 

	9 
	3 
	9 
	10 

 	  

 
	  
 	90*
 60 

	12 
	3 
	12 
	12 
	
60 
	Производство фталевого ангидрида из нафталина 
	тыс . т 
	24 
	6 
	3 
	6 
	  8 
	
61 
	Производство фталевого ангидрида из О-ксилола 
	тыс. т 
	12-24 
	6 
	3 
	6 
	8 
	
62 
	Производство малеинового ангидрида 
	тыс. т 
	6 
	6 
	3 
	6 
	8 
	
63 
	Производство диметилитерефталата 
	тыс. т 
	21 
	6 
	3 
	6 
	8 
	
64 
	Производство 
толуилендиизоцианата     
 	тыс. т 
	3,6 
	6 
	3 
	6 
	8 

 	 

 	7,2 

	7 
	3 
	7 
	8 
	
65 
	Производство хлорбензола 
	тыс. т 
	25-40 
	6 
	3 
	6 
	8 
	
66 
	Производство анилина 
	тыс. т 
	25 
	6 
	3 
	6 
	8 
	
67 
	Завод по производству фосфорных удобрений и серной кислоты      
 	млн. руб.
 	20*
 14,5
 
	7 
	2 
	7 
	7 

 	 

 	40*
 30
 
	8 
	3 
	8 
	8 

 	  

 	75*
 55
 
	9 
	3 
	9 
	9 

 	  

 	200*
 130
 
	10 
	4 
	10 
	10 

 	  

 	320*
 250 

	12 
	5 
	12 
	12 
	
68 
	Производство двойного суперфосфата      
 	тыс. т 
	350 

	7 
	3 
	6 
	7 

 	
	  
 	700 

	8 
	3 
	7 
	7 

 	  
 	  
 	1400 
	9 
	4 
	8 
	8

69 
	Производство сложных удобрений (на экстракционной кислоте) 
	тыс. т 
	540 
	7 
	3 
	6 
	7 
	
70 
	Производство обесфторенных фосфатов     
 	тыс. т 
	300-400 

	7 
	3 
	7 
	7 

 	  
 	  
 	600 
	8 
	4 
	8 
	8 
	
71 
	Производство аммофоса 
	тыс. т 
	800 
	7 
	3 
	7 
	7 
	
72 

 	Производство контактной серной кислоты на отходящих газах 
	тыс. т 

 	300 

 	7 
  
 	3 

 	7 

 	7

 	
73 

 	Производство контактной серной кислоты на колчедане 
	тыс. т 

 	1000 

 	7 

 	3 

 	7 

 	7

 	
74 

   
 	Производство бутиловых спиртов методом оксосинтеза по нефтенантной схеме 
	-

   
 	30 

   
 	7 

   
 	3 

   
 	7 

   
 	9 

   
 	
75 

   
 	Производство спиртов методом оксосинтеза по нефтенантной схеме 
	тыс. т 

   
 	30 

   
 	7 

   
 	3 

   
 	7 

   
 	9 

   
 	
76 

 	Производство спиртов прямым гидрированием синтетических жирных кислот      
 	тыс. т 

   
 	13 

 	7 

	3 

 	7 

	9 

 	
77 

   
 	Производство спиртов гидрированием бутиловых эфиров СЖК 

	тыс. т 

   
 	20 

   
 	7 

   
 	3 

   
 	7 

   
 	9 

   
 	
78 
  
 	Производство полипропилена 
     
 	тыс. т 
  
 	25 
  
 	7 
  
 	3 
  
 	7 
  
 	9 

79 
  
 	Производство этилена и пропилена 
     
 	тыс. т 
  
 	60 
  
 	7 
  
 	3 
  
 	7 
  
 	9 

80 

 	Производство полиэтилена высокого давления 
	тыс. т 

 	24 

 	7 

 	3 

 	7 

 	9 

 	
________________    
      * Числитель - полная стоимость, знаменатель - стоимость строительно-монтажных работ.
 
Примечание. По объектам, для которых не указаны сроки исполнения изыскательских работ, изыскания должны производиться одновременно по всему предприятию. В случае отсутствия материалов по изысканиям, сроки их исполнения устанавливаются в зависимости от объема выполняемых работ.      

VI. ПАРОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

								
N
 п/п 
	Наименование 
объекта 
	Единица изме- рения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Электростанция закрытого или открытого типа, работающая на твердом топливе, без установок сероулавливания при прямоточном водоснабжении или оборотном при наличии водохранилища      
 	МВт 
	50-75 

	5 
	3 
	3 
	6 

   

   
 	100-200 

	5 

	3 

	3 

	6 

  

 	  
   
 	300-500 

	7 

	5 

	4 

	8 

  

 	  
   
 	600-900 

	7 

	5 

	4 

	8 

  

 	  
   
 	1000-1500
  
 	9 

	5 

	6 

	10 

  

      

 	1800-2400 

	9 

	6 

	6 

	10 

  

 	Более 2400
  
 	10 
	8 
	8 
	10 
	
Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования на стадии рабочих чертежей при разработке проектов электростанций мощностью 600-900 и 1000-1500 МВт с агрегатами на 200 и 300 МВт увеличивается на 1 месяц. 

2. Нормативная продолжительность проектирования по согласованию с заказчиком может быть изменена: 

а) при разработке проектного задания и рабочих чертежей ТЭЦ - до 1,2; 

б) при проектировании на стадии проектного задания электростанций и ТЭЦ, работающих на двух видах топлива, - до 1,05, на газе или жидком топливе - до 0,9; 

в) при проектировании на стадии проектного задания электростанции с оборотной системой водоснабжения с прудом-охладителем - до 1,2. 

	

 VII. ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица изме- рения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
  
 	Русловая гидроэлектростанция на мягком и скальном грунтах с напором до 30 м      
 	тыс. кВт 
	До 300 

	15
 
	12
 
	15
 
	12

  

	  
   
 	От 300 до 1500 

	18
 
	15
 
	18
 
	14

  

	  
   
 	От 1500 до 5000 
  
 	23 
	18 

	21 

	18 
	
2 
  
 	Приплотинная гидроэлектростанция на скальном грунте с напором от 30 до 100 м      
 	тыс. кВт 
	До 300 

	15
 
	12
 
	15
 
	12

  

 

 	От 300 до 1500 

	18
 
	15
 
	18
 
	14

  

 

 	От 1500 до 5000 
  
 	23 
	18 
	21 
	18 
	
3 
  
 	Приплотинная гидроэлектростанция на скальном грунте с напором свыше 100 м 
	тыс. кВт 
	До 300 

	18
 
	15
 
	18
 
	15

  

 

 	От 300 до 1500 

	21
 
	18
 
	21
 
	16

  

 
	  
 	От 1500 до 5000 
  
 	26 
	21 

	24 

	18 
	
4 
  
 	Деривационная или смешанная гидроэлектростанция с разным напором      
 	тыс. кВт 
	До 100 

	12
 
	10
 
	12
 
	15

  

 

 	От 100 до 500
 
	15
 
	13
 
	15
 
	16

  

 	От 500 до 2000 
	20 
	15 
	18 
	18 

Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования на стадии проектного задания может быть увеличина по согласованию с заказчиком: 

а) в зависимости от сложности рельефа местности - до 1,3; 

б) при создании водохранилищ площадью свыше 1000 км с наличием в их зоне большой заселенности и залесенности, большого количества предприятий и сооружений, а также при обеспечении интересов более трех отраслей народного хозяйства (водный транспорт, лесное хозяйство, рыбное хозяйство, ирригация, защита промышленных предприятий и крупных населенных пунктов) - до 1,15. 

2. Указанные в таблице нормы продолжительности проектно-изыскательских работ для строительства гидроэлектростанций предусматривают наличие государственных геодезических съемок М=1:25000 и наличие государственных геологических карт М=1:100000 районов гидроузла и зоны водохранилища. 

         
 
VIII. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

													
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

	  
 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 

 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
  
 	Завод металлургического, горнорудного, уникального, тяжелого и дробильно-размольного оборудования      
 	тыс. т в год 
	До 80
 
	7,5 

	2,5 

	7 

	6 

  

 

 	От 80 до 120
 
	8 

	2,5 

	7,5 

	7 

  

	  
  
 	От 120 до 200 

	8,5  
   
 	3 
	8   
 	8   

2 
  
 	Завод турбин 

	млн. кВт 
в год 
	До 3
 
	8,5 

	2,5 

	8 

	6 

  

 

	  
 	От 3 до 6
 
	9,5
  
 	2,5 

	9 

	7 

  

	  
   
 	От 6 до 12 

	10,5 
	3 

	10 
 
 	8   
 	
3 
  
 	Завод сложных машин (центрифуги, бумагоделательные машины, автоматы разного назначения)
 	млн. руб.
 в год 
	До 5 

	6,5 

	2 

	6 

	5 

  

 
	  
 	От 5 до 10 

	7 

	2 

	6,5 

	5,5 

  

 	  
   
 	От 10 до 15 

	7,5 

	2 

	7 

	6 

  

 

	  
   
 	От 15 до 20 

	8 

	2,5 

	7,5 

	6,5 

  

  

   
 	Свыше 20 
  
 	9 
  
 	2,5 
  
 	8 
  
 	7 

4 
  
 	Завод промышленной арматуры литой или кованой и прочих изделий 
	млн. руб.
 в год 
	До 10 

	6,5 

	2 

	6 

	5 

  

 

 	От 10 до 15 

	7 

	2 

	6,5 

	5,5 

  

 

 	От 15 до 20 

	7,5 

	2,5
  
 	7 

	6 

  

	  
 	Свыше 20 
  
 	8 

	2,5 
  
 	7,5 
  
 	7 

5 
  
 	Завод энергетических и промышленных котлов; котельно-вспомогательного оборудования, химической и котельной аппаратуры и компрессоров     
 	тыс. т в год 
	До 60 

	6,5 

	2,5 

	6 

	6 

  

 

 	От 60 до 100 

	7 

	2,5 

	6,5 

	6,5 

  

 

	  
 	От 100 до 250 
	8 
	3 
   
 	7,5   
 	7 
	
6 
  
 	Завод по производству экскаваторов; самоходных стреловых кранов; дорожных и подъемно-строительных машин; транспортного оборудования     
 	тыс. т в год 
	До 15 

	6,5 

	2,5 

	6
  
 	5 

  

 

 	От 15 до 30 

	7 

	2,5 

	6,5 

	5,5 

  

	  
   
 	От 30 до 80 

	7,5 

	2,5 

	7 

	6 

  

 

	  
   
 	От 80 до 120 

	8,5 

	3 

	7,5 

	6,5 

  

 

	  
   
 	От 120 до 150 

	9 

	3 

	8 

	7 

  

 

 	От 150 до 170  
  
 	10 
   
 	3 
	9 
	8 
	
7 
  
 	Завод тепловозостроения 
	шт. в год 
	До 400 

	7,5 

	2,5 

	7 

	6 

  

 

 	От 400 до 1000 

	8,5 

	2,5 

	8 

	7 

  

 

 	От 1000 до 1500  
 
	10 
  
 	3 

	9 
  
 	8 

8 
  
 	Завод дизелестроения 
	млн. л.с. 
в год 
	До 1 

	6,5 

	2 

	6 

	6 

  

 

 	От 1 до 1,5 

	7,5 

	2 

	7 

	7 

  

	  
 	От 1,5 до 2 
  
 	8,5 
  
 	2 
  
 	8   
 	8  
 	
9 

 	Завод грузового вагоностроения    
 	
	До 8 
До 256 

	6,5 

 	2,5 

	6 

 	6 

	

   

	 

 	 От 8 до 12   
От 256 до 384 

	  7,5
   
 	 3   
 	  7
   
 	  6 

  

	  
 	  От 12 до16  
 От 384 до 512
 
	9 

	3 

	8 

	7 

10 

 	Завод пассажирского вагоностроения 

	 До 1   
 До 57 

	6,5 

	2,5 

	6 

	6 

	

   

  

   
 	  От 1 до 2    
 От 57 до 114 

	7,5 

	2,5 

	7 

	6 

	

 
	  
 	От 2 до 3 
От 114 до 170 
	8,5 

 	3 

 	8 

 	7 

 	
11 

 	Завод электровагоностроения 
	
	До 0,5 
До 30 

	6,5 

	2,5 
  
 	6 
  
 	6 

	

   

  

   
   
 	От 0,5 до 1 
От 30 до 60 

	7,5 

	3 

 	7 

	6 

 	

 
	  
 	От 1 до 1,5 
От 60 до 90 
	8,5 

 	3 

 	8 

 	7 

 	
12 
  
 	Завод мелкого и среднего электромашиностроения: электродвигателей с I по ХIII габарит; низковольтной и высоковольтной аппаратуры (комплектно- распределительные устройства КРУ; аппаратура массового применения); светотехнической арматуры: силовых трансформаторов с I и III габарит; мелких электропечей; электроугольных изделий; аккумуляторных и изоляционных; ртутных выпрямителей и других аналогичных изделий     
 	млн. руб.
 в год 
	До 10 

	6,5 

	2,5 

	6 

	6 

  

 

 	От 10 до 25 

	7,5 

	2,5 

	7 

	6,5 

  

	  
   
 	От 25 до 43,5 

	8,5 

	3 

	8 

	7 

  

 	 

 

   
 	От 43,5  до 62 
  
 	10 

 	3 

 	9 

 	8 

 	
13 
  
 	Главный корпус завода мелкого и среднего электромашиностроения и аппаратостроения с заводским выпуском      
 	млн. руб.
 в год 

	До 10 

	5,5 

	1,5 

	5 

	5 

  

 
	  
 	От 10 до 43,5
  
 	6,5
  
 	1,5 

	6 

	6 

 

	  
 	От 43,5 до 62 

	 8 
	2 
	7 
 
 	7 
	
14 
  
 	Отдельный корпус мелкого и среднего электромашино- и аппаратостроения (производство электромашин, трансформаторов, аппаратуры, светотехнической арматуры, мелких электропечей и т.п.) с заводским выпуском      
 	млн. руб.
 в год 
	До 10 

	5,5 

	1,5 

	5 

	5 

  

 

 	От 10 до 43,5 

	6,5 

	1,5 

	6 

	6 

  

	 
 	От 43,5 до 62 
  
 	8 
  
 	2 

 	7 
	7 

 	
15 
  
 	Отдельный корпус мелкого и среднего электромашиностроения с технологическими процессами, требующими сложного инженерного оборудования и санитарно-технических устройств (производство изоляции, полупроводниковых вентилей, электроугольных и металлокерамических изделий, химических источников тока, ртутных вентилей, лабораторий и т.п.) с заводским выпуском     
 	млн. руб.
 в год 
	До 10 

	6 

	2 

	5,5 

	6 

  

 
	  
 	От 10 до 28 

	7 

	2
  
 	6,5 

	7 

  

 	 

 

     
 	От 28 до 62 
  
 	8,5 

 	2 

 	8 

 	8 

 	
16 
  
 	Завод тяжелого электромашиностроения и трансформаторостроения, в том числе: турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных машин с XIV по XVI габарит, трансформаторов с IV по VI габарит, крупных масляных выключателей, дуговых стале- и ферросплавных печей на 60-100 т и других аналогичных изделий      
 	млн. руб.
 в год 
	До 25 

	8 

	2,5 

	7 

	7 

  

	 
   
 	От 25 до 50 

	9 

	2,5 

	8 

	8 

  

 	  

   
    
 	От 50 до 90 

	10 

 	3 

 	9 

 	9 

 	
17 
  
 	Главный корпус завода тяжелого электромашиностроения с заводским выпуском 
	млн. руб.
 в год
 
	До 25 

	7 

	2 

	6,5 

	7 

  

 	

   
 	От 25 до 90 
     
 	8 

 	2 

 	7,5 

 	8 

	
18 

   
 	Аппаратный корпус завода тяжелого электромашиностроения с заводским выпуском      
 	млн. руб.
 в год 
  
 	До 25 

   
 	7 

   
 	2 

   
 	6,5 

   
 	7 

   

	

	От 25 до 90 

	8 

	2 

	7,5 

	8 

19 

   

   
   
 	Завод металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, деревообрабатывающих станков, литейного оборудования, станочных принадлежностей, приспособлений, наладок и специально литейный (центролит)
 	тыс. т в год 

   

 	До 15 

 

  
 	7,5 

  
     
 	2 

    
 	7,5 

    
 	7 

    

	

	От 15 до 25 

	8 

	2 

	8 

	7,5 

	

	От 25 до 45 

	9 

	2,5 

	9 

	8 

20 
  
 	Литейный завод (центролит)
 	тыс. т в год 

	80 
  
 	9,5 
  
 	3 
  
 	9 
  
 	8 

21 

 	Завод инструментальной гидроаппаратуры и станочной аппаратуры 
	млн. руб. 
в год
   
 	До 15 
    
 	6,5 
    
 	1,5 
  
 	6 
  
 	6 

	

	От 15 до 25 

	7,5 

	2 

	7 

	7 

22 

   

   

 	Отдельный механосборочный корпус заводов: металорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, деревообрабатывающих станков, литейного оборудования, сварочных принадлежностей, приспособлений и наладок 
	тыс. т в год 

   

   
   
 	До 6 

   

   

 	4,5 

   

   

 	1 

   

   

	4,5 

   

   

 	6 

   

   

 	

	
	От 6 до 10 

	5 
	1 
	5 
	7 

	

	От 10 до 25 

	6 
	1 
	6 
	8 
	
23 

   
 	Главный корпус заводов: инструментального, гидроаппаратуры и станочной аппаратуры 
	млн. руб.
 в год 

 	До 2 

 	4 

 	1 

 	4 

 	6 

	

	От 2 до 5 

	5 

	1 

	5 

	7 

	

	От 5 до 7,5 

	5,5 

	1 

	5,5 

	8 

24 

 	Завод абразивного инструмента на керамической связке 
	тыс. т в год 
	До 25 

 	6,5 

 	1 

 	6,5 

 	7 

 	
25 

	Завод абразивного инструмента на бакелитовой и вулканитовой связках 
	тыс. т в год
 
	До 30 

 	6,5 

 	1,5 

 	6 

 	8 

 	
26 
  
 	Завод по производству электрокорунда 
	тыс. т в год
 
	До 120 
  
 	8 
  
 	1,5 
  
 	7 
  
 	8 

27 
	Завод шлифовальной шкурки 
	млн. м
 в год
 
	До 35 
	6,5 
	1 
	6 
	8 
	
28 
	Корпус по производству карбида бора 
	тыс. т в год 

	До 1,5 
	4 
	1 
	4 
	7 
	
29 

 	Корпус по производству шлифовальных изделий 
	тыс. т в год
 
	До 25 

 	5,5 

 	1 

 	5,5 

 	7 

 	
30 

 	Корпус по производству шлифовальной шкурки 
	млн. м
 в год
 
	До 15 

 	4,5 

 	1 

 	4,5 

 	7 

 	
31 
  
 	Завод грузовых автомобилей грузоподъемностью 3-4 т 
	тыс. машин в год 
	До 50 

	8,5 

	2,5 

	8 

	10 

  

 

 	От 50 до 100 

	9,5 

	2,5 

	9 

	10 

  

 

	  
   
 	От 100 до 150 

	11 

	3 

	10 

	11 

  

	  
 	От 150 до 250 
  
 	12 
  
 	3,5 
  
 	11 
  
 	12 

32 
   
 	Сборочный завод 
грузовых автомобилей   
 	тыс. машин 
в год 
	До 20 
 
 	5,5 
  
 	2 

	5,5 

	6 

	

	От 20 до 60 
	6,5 
	2,5  
 	6,5 
	6 

Примечание. При проектировании заводов грузовых автомобилей иной грузоподъемности программа приводится к 4-тонным автомашинам. 

	
33
   
 	Завод малолитражных автомобилей типа “Москвич” (легковых)
 	тыс. машин 
в год 

	До 75 

	9 

	2,5 

	8 

	8 

  

 
	  
 	От 75 до 150
  
 	9,5 

	2,5 

	8,5 

	9 

  

 

	  
   
 	От 150 до 300 

	10 

	3 

	9 

	10 

  

 

 	От 300 до 400 

	11 

	3 

	10 

	11 

  

	  
 	От 400 до 600 

	12 
  
 	3,5 
  
 	11 
  
 	12 

34 
  
 	Сборочный завод малолитражных автомобилей 
	тыс. машин 
в год 
	До 25 

	5,5 

	2 

	5,5 

	6 

  

 

	 
   
 	От 25 до 50 

	6,5 

	2 

	6,5 

	6 

  

 

 	От 50 до 100 
	7 
  
 	2,5 
    
 	7 
  
 	7 

Примечание. Нормативная продолжительность проектирования заводов легковых автомобилей среднего класса типа "Волга" норма принимается с 1,15; микролитражных автомобилей типа “Запорожец” с 0,9. 

	
35 
  
 	Завод легких мотоциклов 
(125 м)
 	тыс. машин в год 

	До 50 

	5,5 

	2 

	5,5 

	6 

  

	
	От 50 до 100 

	6,5 

	2 

	6,5 

	7 

  

  

   
 	От 100 до 200
  
 	7,5 
  
 	2,5 
 
 	7,5 
  
 	8 

36 
  
 	Завод велосипедов 

	тыс. машин в год 
	До 150 

	5,5 

	2 

	5,5 

	6 

  

 

	
	От 150 до 300 

	6 

	2 

	6 

	6

  

	  
   
 	От 300 до 500 

	7 
  
 	2,5 
  
 	7 
  
 	7 

37 
  
 	Завод автомобильных деталей 
	тыс. т в год 

	До 10 

	6 

	2 

	6 

	6 

  

 

	  
   
 	От 10 до 20 

	6,5 

	2 

	6,5 

	6 

  

 

	  
 	От 20 до 30 

	7 

	2 

	7 

	7 

  

	  
 	От 30 до 50 
  
 	8,5 
  
 	2,5 
  
 	8 
  
 	8 

38 
 
 	Завод рессор 
	тыс. т в год 
	240 
  
 	8,5 
  
 	2,5 
  
 	8 
 
 	8 

39 
  
 	Подшипниковый завод (шариковых и роликовых) нормальной точности со средним весом подшипников 0,7 кг     
 	млн. шт.
 в год 

	До 20 

	6 

	2 

	6 

	7 

  

	  
   
 	От 20 до 40 

	7 

	2,5 

	6,5 

	8 

  

 

	    
   
 	От 40 до 60 

	8 

	3 

	7 

	9 

  

 

	  
   
 	От 60 до 80 

	9 

	3 

	8 

	10 

	
	
	От 80 до 120 
	10 
	3,5 
	9 
	11 

Примечание. При проектировании заводов подшипников иного среднего веса и класса точности программа выпуска должна быть приведена к нормальному классу точности подшипников весом 0,7 кг (представитель - подшипник N 1206). 

	
40 
  
 	Завод автоэлектроприборов 
	млн. руб.
 в год 
	До 150 

	6 

	2 

	6 

	7 

  

 

	 
   
 	От 150 до 200
  
 	7 

	2 

	7 

	7,5 

  

	  
 	От 200 до 300 

	8 
  
 	2 
  
 	8 
  
 	8 

41 
  
 	Заводы автомобильных двигателей:
 	тыс. шт. 
в год 
	До 80 

	7,5 

	2 

	7 

	7 

	

	От 80 до 120 

	8 

	2 

	7,5 

	8 

  
   
 	а) микро- и малолитражных 
(23-60 л.с.) 
	  
 	От 120 до 160 

	8,5 

	2,5 

	8 

	9 

  

	  
   
 	От 160 до 225 

	9,5 

	2,5 

	9 

	10 

  

  

 	От 225 до 700 

	11 
  
 	3 
  
 	10 
  
 	11 

  
   
 	б) среднелитражных (101-180 л.с.)
 	тыс. шт. 
в год 
	До 50 

	8,5 

	2,5 

	8 

	8 

  

 

   
 	От 50 до 80 

	9 

	2,5 

	8,5 

	9 

  

 

   
 	От 80 до 120 

	9,5
  
 	3 

	9 

	10 

  

 

	  
   
 	От 120 до 160 

	11 

	3 

	10 

	11 

  

 

	  
 	От 160 до 300 

	12 

	3,5 

	11 

	12 

  

	  
 	От 300 до 800 

	12 
  
 	3,5 
  
 	12 
  
 	12 

  
   
 	в) крупнолитражных (181-250 л.с.)
 	тыс. шт.
 в год 
	До 50 

	9 

	2,5 

	8,5 

	10 

  

 

   
 	От 50 до 80 

	9,5 

	3 

	9 

	11 

  

 

	  
 	От 80 до 120 

	10,5 

	3,5 

	10 

	12 

  

	  
 	От 120 до 160 
  
 	12 
  
 	3,5 
 
 	11 
  
 	12 

42 

 	Завод по изготовлению колесных тракторов типа МТЗ-50 и комбайнов 
	тыс. шт.
 в год 
  
 	До 120 

 	9 

 	3,5 

 	9 

 	10 

 	
43 

 	Моторостроительный завод двигателей типа СМД 
	тыс. шт. 
в год 
	До 200 

 	7,5 

 	3 

 	7,5 

 	9 

 	
44 

 	Завод топливной аппаратуры (топливные насосы) 
	тыс. ком-
 плектов 
в год 

	До 50 

 	6 

 	3 

 	6 

 	7 

 	
45 

   
 	Завод запасных частей (производство гильз, поршней и пальцев)
 	млн. шт.
 в год 
  
 	До 6 

   
 	5 

   
 	3 

   
 	5 

   
 	7 

   
 	
46 

 	Завод запасных частей (шестерен, шлицев, валиков) 
	млн. шт.
 в год 
	До 7,5 

 	6 

 	3 

 	6 

 	7 

 	
47 

     
 	Сельскохозяйственный завод (специализированный) на 8-10 модификаций культиваторов 
	тыс. шт.
 в год 

 	До 160

     
 	7,5 

    
 	3,5 

     
 	7,5 

     
 	9 

     
 	
48 
  
 	Специализированный завод кабельных изделий, не требующий применения крановых средств свыше 5 т (эмальпровода, установочные шнуры и провода, провода для радиофикации и телефонизации сельского хозяйства)     
 	млн. руб.
 в год 

	До 25 

	7 

	1,5 

	7 

	8 

  

 

 	От 25 до 50 

	8 

	2 

	8 

	9 

  

 	  

   
    
 	От 50 и более 

	9 

	2,5 

 	9 

	10 

 	
49 
  
 	Специализированный завод кабельных изделий, требующих применения крановых средств свыше 5 т (голые провода, силовые кабели, тяжелые шланговые кабели, кабели связи, обмоточные провода и т.п.)     
 	млн. руб.
 в год 

	До 50 

	8,5 

	2,5 

	8 

	9 

  

 

 	От 50 до 100 

	9,5 

	2,5 

	9 

	10 

  

 
	  
 	От 100 и более 

	10,5 
 
 	3 
	10 
	11 

50 
  
 	Завод широкого профиля без прокатного цеха (в выпуск завода могут входить как легкие, так и тяжелые кабельные изделия)     
 	млн. руб.
 в год 

	До 25 

	8,5 

	2 

	8,5 

	9 

  

	  
   
 	От 25 до 50 

	9,5 

	2,5 

	9,5 

	10 

  

	  
   
 	От 50 до 100 

	10,5 

	3 

	10,5 

	11 

  

 

	  
   
 	От 100 и более 

	11,5 
	3 
	11,5 
  
 	12 
	
51 
  
 	То же, с прокатным цехом 
	млн. руб.
 в год 
	До 100 

	10,5 

	2,5 

	10 

	10 

  

 
	  
 	От 100 до 200 

	11,5 

	3 

	11 

	11 

  

	  
 	От 200 и более 
	12,5 
   
 	3,5 
  
 	12 
  
 	12 

52 
  
 	Завод по изготовлению приборов контроля и регулирования теплоэнергетических процессов, гидрометеорологических приборов, электроизмерительных приборов, медицинской аппаратуры и мединструментов, или завод приборов для физических исследований, или завод научного приборостроения 
	млн. руб.
 в год 

	До 5 

	7 

	1,5 

	7 

	5 

  

	  
   
 	От 5 до 10 

	7,5 

	1,5 

	7,5
  
 	5 

  

 

 	От 10 до 20 

	8 

	2 

	8 

	6 

	
	
	От 20 до 40
 
	9
 
	2
 
	9 
	7

53 
  
 	Завод по изготовлению приборов и изделий телемеханики, рентгеновских установок, дезинфекционного оборудования, испытательных машин, приборов для измерения механических величин, дозаторов и киноаппаратуры 
	млн. руб.
 в год
  
 	До 5 

	7 

	1,5 

	7 

	5 

  

	  
 	От 5 до 10 

	8 

	1,5 

	8 

	5 

  

	  
   
 	От 10 до 20 

	9 

	2,5 

	8,5 

	7 

	

	От 20 до 40
 
	10
 
	2,5
 
	9 
	8

54 

    
 	Завод по изготовлению стеклянных термометров и химиколабораторной посуды из стекла, фарфора, кварца 
	млн. руб.
 в год 
  
 	До 5 

  
 	7 

   
 	1,5 

  
 	7 

   
 	8 

   

	

	От 5 до 10 

	8 

	1,5 

	8 

	9 

	

	От 10 до 15 

	9 

	2 

	9 

	10 

55 
  
 	Завод по изготовлению часов и часовых механизмов 
	млн. руб.
 в год 
	До 5 

	7 

	1,5 

	7 

	6 

 

 

	От 5 до 10 

	8 

	1,5 

	8 

	7 

  

 

 	От 10 до 15 

	9 

	2 

	9 

	8,5 

  

	  
 	От 15 до 25 

	9,5 

	2 

	9,5 

	9 

  

	  
 	От 25 до 40 
  
 	10 
  
 	2 
  
 	10 
  
 	10 

56 

   
 	Завод радиоэлектроники (широковещательная радиоаппаратура, радиостанции, проводная связь, электронно-
 вычислительные машины и аппаратура, радиоаппаратура и т.п.)
 	млн. руб.
 в год 
  
 	До 5 

	6,5 

 
	2 

	6 

 
	5 

	

	
	От 5 до 10 

	7,5 

	2,5 

	7 

	6 

  

	  
   
 	От 10 до 15 

	8,5 

	2,5 

	8 

	7 

  

	  
   
 	От 15 до 25
  
 	9 

	3 

	9 

	8 

  

 

	  
   
 	От 25 до 40 

	10 

	3 

	10 

	9 

  

 

	  
   
 	От 40 до 65 

	11 

	3,5 

	11 

	10 

  

 

 	От 65 до 80 

	12 
	3,5 
	11,5 
	11 

57 
  
 	Главный корпус предприятий радиоэлектроники (независимо от наличия других корпусов на заводе), инженерно-лабораторный и сборочный корпуса и испытательные станции развернутой площадью      
 	тыс. м 
	До 10 

	5,5 

	1,5 

	5 

	5 

  

	
	От 10 до 15 

	6,5 

	1,5 

	6 

	6 

  

 

 	От 15 до 20 

	7,5 

	2 

	7
  
 	7 

  

	  
 	От 20 до 40 
    
 	8,5 
  
 	2,5 
	8 
 
 	8 
	
58 

   
 	Корпуса завода радиоэлектроники: вспомогательных цехов, автомонтажный, административный, ОКБ или СКБ с выпуском      
 	млн. руб.
 в год 
  
 	До 15 

	5 

	1,5 

	5 

	6 

 

	

	От 15 до 40 

	6 

	1,5 

	6 

	6,5 

	
	
	От 40до 65 
	7 
	2 
	7 
	7 

Примечание. При проектировании заводов с заготовительными цехами нормативная продолжительность проектирования по согласованию с заказчиком увеличивается на коэффициент до 1,2. 

	
59 
  
 	Цехи чугунного литья:

 

 	  

   

 	  

  
   
 	а) единичного и мелкосерийного производства 
	тыс. т в год 
    
 	До 20 

	5,5 

	2 

	5 

	6 

  

 

	  
   
 	От 20 до 30 

	6,5 

	2 

	6 

	7 

  

 

 	От 30 до 60 

	7,5 

	2 

	7 

	8 

  

	  
 	От 60 до 100 

	8 
  
 	2 
  
 	8 
  
 	9 

  
   
 	б) крупносерийного и массового производства      

 	До 35 

	6,5 

	2 

	6 

	7 

  

 

	  
   
 	От 35 до 60 

	7,5 

	2 

	7 

	8 

  

 

 	От 60 до 100 

	8,5 

	2 

	8 

	9 

  

	  
 	От 100 до 150 
  
 	9,5 
  
 	2,5 
  
 	9 
  
 	10 

60 
  
 	Цехи стального литья:

	 

	

	
  
 	а) единичного и мелкосерийного производства 
	тыс. т в год 
	До 20 

	6,5 

	2 

	6
 
	7,5 

	
	
	От 20 до 30 

	7,5 

	2 
  
 	 7 
  
 	8 

  

 

	От 30 до 60  
  
 	8,5  
 	2 

	8 

	9 

	

	От 60 до 100 

	9,5 

	2 

	9 

	10 

  
     
 	б) крупносерийного и массового производства 

 	До 35 
	8,5 

	2 
	8 

	9,5 

	

	От 35 до 60 

	9,5 

	2 

	9 

	10 

  

	  
 	От 60 до 100 
  
 	10,5 
  
 	2,5 
  
 	10 
  
 	11 

61 

 	Цехи кузнечные и прессовые единичного и мелкосерийного производства:

   

   

   

   

   

   

  
   
 	а) кузнечно-молотовый свободной ковки      
 	тыс. т в год 
	До 10 

	6 

	2 

	6 

	5,5 

  

	  
   
 	От 10 до 20 

	7 

	2 

	7 

	6,5 

  
   
 	б) кузнечно-опрессовый 

   
 	До 10 

	6 

	2 

	6 

	5,5 

  

 

	  
   
 	От 10 до 20 

	7 

	2 

	7 

	6,5 

  

  

 	От 20 до 30 

	8 
  
 	2 
  
 	8 
  
 	6,5 

  
   
 	в) прессовый 

   
 	До 50 

	7 

	2 

	7 

	7 

  

 

   
 	От 50 до 70 

	7,5 

	2 

	7,5 

	8 

  

  

 	От 70 до 100 

	8 
  
 	2 
  
 	8 
  
 	8 

62 

   
 	Цехи кузнечные и прессовые крупносерийного и массового производства: 

   

   

 	  

   

   

   

 	  

   

   
 	а) кузнечно-штамповочный 
	тыс. т в год 

	До 25 

	5 

	2 

	5 

	 6 

  

	  
   
 	От 25 до 50 

	7 

	2 

	7 

	7  

  

	  
 	От 50 до 100 

	8 
  
 	2 
  
 	8 

	8 

   
 	б) прессовый листовой штамповки 
	
	До 25 

	7 

	2 

	7 

	8 

  

 

	  
   
 	От 25 до 50 

	8 

	2 

	8 

	9 

  

	  
 	От 50 до 100 

	9 

	2,5 

	9 
	10   
 	
63 
  
 	Цех металлических конструкций 
	тыс. т в год 

	До 5 

	4,5 

	2 

	4,5 

	4 

  

 

 	От 5 до 10 

	5 

	2 

	5 

	4 

  

	  
 	От 10 до 15 

	5,5 
 
 	2 
	5,5 
 
 	5   
 	
64 
  
 	Цех металлических конструкций или котельно-сварочный     
 	тыс. т в год 
	До 25 

	6 

	2 

	6 

	6 

  

 

	  
   
 	От 25 до 50 

	6,5
 
	2 

	6,5 

	6,5 

  

	  
 	От 50 до 100 
  
 	7 
  
 	2 
  
 	7 
  
 	7,5 

65 

   
 	Цех механический единичного и мелкосерийного призводства
 общей площадью                      
удельной площадью на станок 
	
	От 5 до 10 
До 25 

	5,5 

	1,5 

	5 

	4,5 

	

   

	 

 	От 5 до 10 
От 25 до 35 

	5,5 
  
 	1,5 
    
 	5,5 
    
 	4,5 

  

	  
 	От 5 до 10 
От 35 до 50
   
 	4 

 	1,5 

 	4 

 	4,5 

 	

 
	  
 	От 10 до 15 
От 25 до 35 

	5,5 
	1,5 
	5 
	5 

 	  

 	От 10 до 15 
От 35 до 50 

	5,5 
	1,5 
	5 
	5,5 

 	  

 	От 15 до 20 
От 35 до 50
 
	6 
	1,5 
	6 
	6 

 	  

 	    До 15     
 От 50 до 150
 
	4 
	1,5 
	4 
	6 

 	  

 	От 15 до 25 
От 50 до 150 

	5,5 
	1,5 
	5,5 
	  7 
	
66 

   
 	Цех механический крупносерийного и массового производства 
общей площадью                    
удельной площадью на станок 
	
	     До 5     
 От 15 до 25 

	5 

	1,5 

	5 

	5 

	

	

	От 5 до 10 
От 15 до 25
 
	6
 
	1,5
 
	6
 
	6

67 
  
 	Цехи сборочные:

 

	  

 

	

	а) единичного и мелкосерийного производства 
	тыс. м 

	До 3 

	3 

	1,5 

	3 

	3 

  

 

 	От 3 до 6 

	4 

	1,5 

	4 

	5 

  

 

	  
   
 	От 6 до 9 

	5 

	1,5 

	4,5 

	5,5 

  

 

	  
 	От 9 до 20 
  
 	5,5 
  
 	1,5 
  
 	5,5 
  
 	6 

  
   
 	б) серийного производства 

   
 	До 3 

	3,5 

	1,5 

	3,5 

	3,5 

  

 

	  
   
 	От 3 до 6 

	4,5 

	1,5 

	4 

	5 

  

 

 	От 6 до 9 

	5 

	1,5 

	4,5 

	5,5 

  

	  
 	От 9 до 20 
  
 	5,5 
  
 	1,5 
  
 	5 
  
 	6 

  
   
 	в) серийного и массового производства      

 	До 3 

	4 

	1,5 

	4 

	5 

  

 

	  
   
 	От 3 до 4,5 

	5 

	1,5 

	5 

	6 

  

	  
 	От 4,5 до 6 
 
 	6 
  
 	1,5 
  
 	6 
 
 	6   

IX. СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 

 	Цех аккумуляторно-зарядный с количеством одновременно заряжаемых аккумуляторов    
 	шт.

 	450 

 	2,5 

	-
  
 	2,5 

	4 

	

	900 

	3,5 

	-
 	3,5 

	5 

2 
  
 	Акватория (независимо от площади) 
	объект 
  
 	1 
  
 	2 
  
 	-
 
	2 
  
 	2,5 

3 
  
 	Берегоукрепление 

	пог. м 
  
 	До 300 

	2 

	-
 
	2 

	2,5 

	

	От 300 

	2,5 

	-
 
	2,5 

	3 

4 

   

   
    
 	Блок корпусных цехов в составе: цеха очистки и пассивирования стали, фотоплаза с шаблонной мастерской, корпусо- обрабатывающего со складом, сборочного и расходного склада стали с суммарным выпуском 
	тыс. т в год 

   

       
 	40 

   

   
      
 	6 

   

   
   
 	-

  

   
      
 	6 

   

   
     
 	4 

   

   

	

	200 

	7 

	-
 	7 

	5 

5 

   

 	Блок комплектующих цехов в составе: слесарно-корпусного, трубного, гальванических покрытий и малярно-заготовительного с суммарным выпуском      
 	т в год 

   

 	3000 

   

 	4 

   

 	-

  

 	4 

   

 	6 

   

 	

	
	7300 

	5 

	-
 	5 

	8 

6 

   

   
    
 	Блок достроечно-сдаточных цехов в составе механо-сдаточного и такелажного; филиалов и участков механо-монтажного, трубного, корпусомонтажного, деревоустановочного и малярно-изоляционного и мастерской электромонтажного цеха 
	м 

   

        
 	2000 

   

   
      
 	2,5 

   

   
     
 	-

  

   
     
 	2,5 

   

   
   
 	5 

   

   

	

	12000 

	3,5 

	-
 	3,5 

	6 

7 
  
 	Базисный склад стали 
	т 
  
 	2500 

	1,5
 
	-
 
	1,5
 
	2,5 

	

	10000 

	2 

	-
 	2 

	3 

8 

   

   
  
 	Блок складов в составе главного магазина и складов: проката и труб, судового оборудования , ЭМПа, кабеля с участком заготовки и комплектации, ЦИСа, резервов, заводского оборудования и запчастей ОГМ, ОКСа, готовой продукции МЭК, отливок и поковок      
 	т 

   

   
     
 	10000 

   

   

 	3,5 

   

   

 	-

  

   
     
 	3,5 

   

   

 	5 

   

   

	

	30000 

	4 

	-
 	4 

	6 

9 
     
 	Цех корпусообрабатывающий с выпуском готовой продукции   
 	тыс. т в год 

	20 

	4 

	-
   
 	4 

	7 

	

	100 

	5 

	-
 	5 

	8 

10 
 
 	Цех корпусоремонтный с выпуском готовой продукции 
	т
 
	3000 

	3 

	-
 
	3 

	6 

	

	3500 

	3,5 

	-
 	3,5 

	7 

11 
  
 	Цех контрагентский 

	работающих 
	100 

	3 

	-
 
	3 

	5 

	

	600 

	3,5 

	-
 	3,5 

	6 

12 
	Морской канал 
	объект 
	1 
	2 
	-
 	2 
	2,5 

13 

 	Набережная глубоководная 
длина
 высота 

	 200 
15 
	 4 
  
 	-
   
 	4 
  
 	 6 

14 

 	Набережная мелководная 
длина
 высота 
	пог. м 
м 
  
 	150 
5 

	3 

	-

	3 
  
 	5 

  

  

   
 	325 
10 

	3,5 

 	-

 	3,5 

 	6 

 	
15 

 	Набережная хозяйственная 
длина
 высота  
 	пог. м 
м 
  
 	150 
8 

	2 

 	-

 	2 

 	3 

 	

	
	200 
8 

	2,5 

	-
 	2,5 

	3,5 

16 

    
 	Наливная камера одноместная 
ширина нижней ступени
 напор 
	м 
м

 	15 
10 

 	5 

 	-

 
 	5 
    
 	5 

 	

	
	32
 16 

	6 

	-
 	6 

	6 

  

   
 	Наливная камера двухместная 
ширина нижней ступени
 напор 

	м 
м
       
 	32 
16 
      
 	7 

     
 	-

     
 	7 

     
 	7 

     
 	
17 

   
 	Наливной док 
длина
 ширина
 глубина 

	м 
м 
м 
	300 
 40  
 10 
	 5 
  
 	 -
   
 	5 
  
 	  9 

18 

   
   
 	Полушлюз с наливным бассейном и земляными дамбами 
отверстие         
 высота отметки      
 	м 
м 

 	 30 
15 

	3 

  
 	-

 
	 3 

 
  
 	6 

 

	

	45 
26 

	4 

	-
 	4 

	8 

19 
	Пирс длина
    ширина
     высота 

	м 
 м 
м 
	150
  20 
9 
	4 
	-  
 	4  
 	8  
 	
20 
	Перемычка   
	м 
м 
	60 
10 

	2 
	-
 	2 
	3 

 	  

 
	  
 	125
 10 

	2,5 
	-
 	2,5 
	3,5 
	
21 
	Площадка зимнего хранения 
    
 	 м 
	До 1500 
	3 
	-
 	3 
	4 
	
22 
	Расходный склад стали 
	т 
	150 

	1,5 
	-
 	1,5 
	3 

 	 

 	1000 
	2 
	-
 	2 
	3,5 

23 
	Склад судового оборудования 
	м  
 	4000 

	1,5 
	-
 	1,5 
	3 

 	  

 
	  
 	8000 
	2 
	-
 	2 
	3,5 

24 
	Склад ЭМПа 
	 м 
	800 

	1 
	-
 	1 
	2 

 	  

 	2000 
	1 
	-
 	1 
	2 

25 

 	Стапельное место открытое с разработкой тяговой оснастки тележек грузоподъемностью 
	тыc. т 
   
 	До 3,5 

	3 

	-
 
	3 
  
 	4 

	

	От 3,5 до 7 

	3,5 

	-
 	3,5 

	5 

26 
	Судовозная дорога на железобетонном основании 
	объект 
	1 
	2 

	-
 	2 
	3 
	
27 
	Судовозная дорога на шпально-балластном основании 
	объект 
	1 
	1,5 
	-
 	1,5 
	2 
	
28 

 	Слип с лебедочной 
грузоподъемность
 длина судна 
	т 
м
   
 	2000 
100 

	3 

	-

	3 

	2,5 

  

  

   
 	6000 
150
 
	4 

 	-

 	4 

 	3 

 	
29 

  
 	Сухой док длина
             ширина
             глубина 
	м 
м 
м 
	200 
28 
9 

	 5 

 	-

 	  5 

 	5 

 	

 

 

   
 	350 
 50 
14,5 

	6 

 	-

 	6 

 	6 

 	
30 
	Склад секций 
	м  
 	1500 

	1 
	-
 	1 
	2,5 

 	  

 	8000 
	1,5 
	-
 	1,5 
	3 

31 

 	Стапель продольный с наплавным фундаментом 
длина             
 спусковой вес 
	    м     
 тыс. т

 	200 
7 

	4 

 	-

    
 	4 

 	7 

   

	

	400 
12 

	4,5 

	-
 	4,5 

	8 

32 
	Стапель поперечный спусковой вес судна     
 	т 
	1000 
	3,5 
	-
 	3,5 
	3,5 

 	 
 	  
 	3000 
	4 
	-
 	4 
	6 
	
33 
  
 	Сборочно-сварочный цех 
	тыс. т в год 

	20 
	3 
	-
 
	3 
	5 

	

	100 

	4 

	-
 	4 

	6 

34 

    
 	Трансборденная яма с конструкцией трансбордера по железобетонным плитам грузоподьемностью      
 	т 

    
 	3000 

   
 	3 

   
 	-

    
 	3 

   
 	5 

   

	

	6000 

	4 

	-
 	4 

	5,5 

35 

 	То же, на шпально-балластном основании грузоподьемностью 
	т 

 	До 1000 

 	4 

 	-

 	4 

 	5 

 	
36 
	Цех агрегатной сборки площадью 
	м  
 	1000 

	3 
	-
 	3 
	6 

 	 

 	5000 
	4 
	-
 	4 
	7 

37 
	Цех окраски и сушки секции площадью      
 	м 
	700 
	2,5 
	-
 	2,5 
	5 

 	

 	3000 
	3 
	-
 	3 
	6 

38 
	Цех облицовочных покрытий площадью      
 	 м 
	2500 
	3 
	-
 	3 
	6 

 	

 	7000 
	3,5 
	-
 	3,5 
	7 

39 
	Цех очистки и пассивирования стали      
 	тыс. т в год 

	24 
	2 
	-
 	2 
	3 

 	

	115 
	2,5 
	-
 	2,5 
	4 

40 
	Цех пластмассовых изделий судового машиностроения      
 	т в год 
	1000 
	4 
	-
 	4 
	6 

 	

	3000 

	5 
	-
 	5 
	8 
	
41 
	Эллинг (блок судостроительных цехов)
 	тыс. т в год 

	25 
	6 
	-
 	6 
	6 

 	

	150 
	7 
	-
 	7 
	7 

42 
	Цех электромонтажный 
	т в год 

	1500 
	3 
	-
 	3 
	6 

 	 

	3500 
	4 
	-
 	4 
	7 

43 
	Завод судостроительный :
 
	  объект 

 	  

 	
  
 	а) III категория 

 	1 
	24 
	18 
	10 
	12 

 	б) I категория 

 	1 
	26 
	18 
	11 
	16 
	
44 
	Завод судоремонтный I категория      
 	объект 
	1 
	28 
	18 
	12 
	14 

Примечание. Изыскательские работы, как правило, выполняются в целом по заводу, и поэтому сроки выполнения изыскательских работ по отдельным зданиям и сооружениям не указаны. В случае необходимости выполнения изыскательских работ для отдельных зданий и сооружений сроки их выполнения устанавливаются в зависимости от объема выполняемых работ. 

          
 X. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

  

 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Цементные заводы в составе:

 	  

 	  

  
 	а) двух технологических линий с печами диаметром 4х60 м
 
	млн. т в год 
	0,6 
	9 
	7 
	3 
	11 

 	б) трех технологических линий с печами диаметром 4х60 м

 	0,9 
	9 
	7 
	3 
	12 

 	в) четырех технологических линий с печами диаметром 4х60 м

 	1,2 
	10 
	7 
	4 
	12 

 	г) двух технологических линий с печами диаметром 4,5х170 м

 	0,8 
	9 
	7 
	3 
	11 

 	д) трех технологических линий с печами диаметром 4,5х170 м

 	1,2 
	9 
	7 
	3 
	12 

 	е) четырех технологических линий с печами диаметром 4,5х170

 	1,6 
	10 
	7 
	4 
	12 

 	ж) двух технологических линий с печами диаметром 5х185 м

 	1,2 
	9 
	7 
	3 
	11 

 	з) трех технологических линий с печами диаметром 5х185 м

 	1,8 
	9 
	7 
	3,5 
	12 

 	и) четырех технологических линий с печами диаметром 5х185 м

 	2,4 
	10 
	7 
	4 
	12 
	
2 
	Расширение цементных заводов (дополнительное строительство):

 	  

 	  

  
 	а) двух технологических линий с печами диаметром 4х60 м
 
	млн. т в год 

	0,6 
	8 
	6 
	4 
	12 

 	б) одной технологической линии с печью диаметром 4,5х170 м
 
	-
 	0,4 
	8 
	6 
	4 
	10 

 	в) двух технологических линий с печами диаметром 4,5х170 м
 
	-
 	0,8 
	8 
	6 
	4 
	12 

 	г) трех технологических линий с печами диаметром 4,5х170 м
 
	-
 	1,2 
	8 
	6 
	4 
	12 

 	д) одной технологической линии с печью диаметром 5х185 м
 
	-
 	0,6 
	8 
	6 
	4 
	12 

 	е) двух технологических линий с печами диаметром 5х185 м
 
	-
 	1,2 
	9 
	7 
	4 
	12 
	
3 
	Цех по производству 

	  
 	33 
600 
	4 

	2 

	3 

	4 

  

	55 
600
 
	4,5 
	2 
	3 
	4 

 	

 	110 
600 

	5 
	2 
	3 
	4 
	
4 
	Цех по производству крупнопанельных прокатных перегородок
 
	тыс. м 
в год 
	600 
	3 
	1,5 
	2 
	3 
	
5 
	Цех по производству керамзита пластическим способом
 
	тыc. м
 в год
  
 	100-200 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
6 
	То же, сухим способом 
	тыс. м 
 в год 

	100-200 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
7 
	Цех по производству санитарно-технических изделий
 
	тыс. т в год 
	5000 
	4 
	2 
	3 
	3 
	
8 
	Керамический комбинат с выпуском: 

	  

	

 	

	  

	

	

	а) канализационных труб
 
б) сантехники 
в) облицовочных плиток 
г) плиток для полов 
д) коврово-мозаичных плиток для наружной облицовки
 
	тыс. т в год 

	

	

 3

 

5 

7  

9 
	Завод мягких кровельных материалов 
    
 	млн. м  
 в год  
 	125 
	5 
	3 
	3 
	7 
	
10 
	Завод изделий из ячеистых бетонов 
	тыс. м 
в год
 
	100 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
11 
	Завод оконного стекла односистемный 
	млн. м  
 в год 

	От 13 до 15 
	7 
	5 
	4 
	12 
	
12 
	То же, двухсистемный 
	млн. м  
 в год 

	От 26 до 30 
	8 
	5 
	5 
	12 
	
13 
	Завод стекла с выпуском 
оконного стекла           
полированного стекла 
     
 	млн.  м  
 в год 
	От 13 до 15 
3 

	7 
	5 
	5 
	12 
	
14 
	Завод полированного стекла (конвейер двухсторонней шлифовки и полировки)
      
 	тыс.  м 
в год 
	3000 
	7 
	4 
	5 
	13 
	
15 
	Производство стеклянных труб  диаметром   
          до 40 мм       
 от 50 до 150 мм 
    
 	тыс. пог. м
 в год 
	8000 
1200 
	-
 	-
 	-
 	10 
	
16 
	Производство силикатглыбы 
	тыс. т в год 

	50 
	-
 	-
 	-
 	8 

 	 

	1000 
	-
 	-
 	-
 	9 
	
17 
	Производство изоляторов 
	млн. шт.
 в год 

	20 
	-
 	-
 	-
 	8 
	
18 
	Производство стеклоблоков 
	млн. шт. 
в год 

	3,2 
	  
 	  -
 	  
 	5 
	
19 
	Главный корпус односистемного завода оконного стекла в составе цехов: машинно-ванного, резного, промпереработки и склада стекла 
      
 	млн. м
  в год 

	От 13 до 15 
	  
 	-
 	  
 	9 
	
20 
	То же, двухсистемного завода 
	млн. м 
в год 

	От 26 до 30 
	  
 	  -
 	  
 	10 
	
21 
	То же, односистемного завода полированного стекла 
	тыс.  м
  в год
 
	3000 
	  
 	  -
 	  
 	10 
	
22 
	Составной цех со складами изготовленной шихты 
	т в сутки
 
	500 
	  
 	-
 	  
 	8 

 	 
 	 
 	750 

 	-
 	  
 	8 
	
Примечание. Отдельные цехи стеклоизделий и стеклосырья проектируются в составе проектного задания реконструкции или расширения завода в целом. 

	
23 
	Предприятие по выпуску фракционированного щебня при производстве открытых горных работ экскаваторным способом (дробильно-сортировочный завод)     
 	тыс.  м
 
	200 
	5 
	3 
	3 
	5 

 	
	  
 	400 
	6 

	4 
	3 
	7 

 	 
 	  
 	600 
	6
  
 	4 
	3 
	7 

 	 
 	  
 	1200 
	7
  
 	4 
	4 
	8 
	
24 
	Предприятие по выпуску фракционированного гравия и щебня при производстве
 открытых горных работ экскаваторным способом (гравийно-сортировочный завод)     
 	тыс.  м
 в год
 
	200 
	5 
	3 
	3 
	5 

 	
	 
 	500 

	6 
	4 
	3 
	6 

 	 
 	  
 	1000 

	7 
	4 
	4 
	7 
	
25 
	Предприятие по выпуску мытого фракционированного песка при производстве открытых горных работ экскаваторным способом (предприятие по обогащению и классификации песка)      
 	тыс.  м
 в год 
	200 
	5 
	3 
	3 
	5 

 	
	 
 	400 

	6 
	4 
	3 
	6 

 	 
 	  
 	600 

	6 
	4 
	4 
	6 

 
XI. ЛЕСНАЯ, ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель- ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих 
чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Лесозаготовительный пункт в действующем леспромхозе 
	тыс. м
 в год
 
	До 100 
	8 
	6 
	3 
	6 
	
2 
	Лесозаготовительное предприятие 
	тыс. м
 в год 
	От 100 до 200 

	10 
	6 
	4 
	7 

 	 
 	 
 	От 200 до 350 

	11 
	7 
	4,5 
	8 

 	  
 	  
 	От 350 до 500
  
 	12 
	8 
	5 
	9 
	
3 
	Лесосплавное предприятие при равнинном рельефе местности, мощностью древесины в навигацию     
 	тыс. м 
	До 500 
	10 
	7 
	4 
	7 

   

	  
   
 	От 500 и более 
  
 	11 
  
 	8 
  
 	4 
  
 	8 

4  
 	То же, при полугорном рельефе местности     
 	тыс. м 
	До 500 

	11 
	8 
	4 
	8 

 	
	  
 	От 500 и более 

	12 
	9 
	5 
	9 
	
5 
	Сортировочный сплоточно-формировочный рейд мощностью сплотки и формировки древесины в навигацию      
 	тыс. м 
	До 500 

	8 
	6 
	4 
	5 

 	
	  
 	От 500 до 1000
  
 	10 
	8 
	4 
	6 

 	  
 	  
 	От 1000 
и более 

	12 
	9 
	4 
	9 
	
6 
	Лесоперевалочное предприятие в составе производственных цехов, участков и объектов вспомогательного назначения 
(с выдачей технологической щепы целлюлозно-бумажной промышленности) грузооборотом круглого леса 
	тыс. м 
	300 
	7 
	5,5 
	2,5 
	10 
	
7 
	То же (с производством 5500 тыс. м в год древесно-волокнистых плит)
      
 	тыс. м 
	300 
	7,5 
	5,5 
	3 
	12 
	
8 
	То же (с производством 25 тыс. мв год стружечных плит)
  
 	тыс. м
 в год
 
	500 
	8 
	5,5 
	3,5 
	15 
	
9 
	То же (с производством 5500 тыс. м древесно-волокнистых плит и лесопилением 250 тыс. м древесины в год)
      
 	тыс. м
 в год 
	1000 
	10 
	8 
	4,5 
	18 
	
10 
	Лесопильно-
 деревообрабатывающий завод четырехрамный в составе производственных цехов и объектов вспомогательного назначения (с объемом деревообработки 50% и выдачей технологической щепы целюлозно-бумажной промышленности) производством пиломатериалов 
	тыс. м
 в год 
	От 135 до 170 
	7,5 
	6 
	3,5 
	12 
	
11 
	То же (с объемом деревообработки 50% и производством изделий ширпотреба) 
	тыс. м 
в год 
	От 135 до 170 

	8 
	7 
	3,5 
	14 
	
12 
	Лесопильно-
 деревообрабатывающий завод восьмирамный в составе производственных цехов и других объектов вспомогательного назначения (с объемом деревообработки 50% и выдачей щепы для целлюлозно- бумажной промышленности) производством пиломатериалов 
	тыс. м 
в год 
	От 300 до 420 
	10 
	8 
	4 
	16 
	
13 
	Лесопильно-
 деревообрабатывающий завод восьмирамный в составе производственных цехов и других объектов вспомогательного назначения (с производством 25 тыс. мстружечных плит)
      
 	тыс. м 
в год 
	От 300 до 420 
	11 
	8,5 
	4,5 
	18 
	
14 
	Лесопильно-
 деревообрабатывающий завод 16-рамный в составе производственных цехов и объектов вспомогательного назначения (с объемом деревообработки до 60% с производством 100 тыс. м стружечных плит и выдачей технологической щепы для целлюлозно-бумажной промышленности) производством 
пиломатериалов 
     
 	тыс. м 
в год 
	600 
	12 
	8 
	8 
	20 
	
15 
	Предприятие по производству клееной фанеры в составе производственного блока, открытого бассейна для гидротермической обработки сырья и комплекса вспомогательных и обслуживающих зданий (с выпуском 2 тыс. мшпона лущеного; 5 тыс. м гнутоклееных деталей для мебели и 50 тыс. мстружечных плит из отходов)
      
 	тыс. м 
в год 
	52 
	6 
	4 
	4 
	5 
	
16 
	То же, с выпуском 100 тыс. м стружечных плит из отходов производства 
	тыс. м 
в год 
	104 
	7,5 
	5 
	5 
	6 
	
17 
	Фабрика по производству мебели для 
оборудования 11 тыс. двухкомнатных квартир в составе: главного производственного корпуса, комплекса обслуживающих и вспомогательных зданий 
	млн. руб. 
в год 
	5,8 
	5 
	3 
	4 
	5 
	
18 
	Фабрика по производству мебели для оборудования 22 тыс. двухкомнатных квартир 

	млн. руб. 
в год 

	11 
	5,5 
	3,5 
	4 
	5 
	
19 
	То же, для оборудования 33 тыс. двухкомнатных квартир 
	млн. руб. 
в год 

	16,6 
	6 
	4 
	4,5 
	5 
	
20 
	То же, для оборудования 12 тыс. двухкомнатных квартир полным набором мебели 
	млн. руб.
 в год 

	10,2 
	6 
	4 
	4,5 
	5 
	
21 
	То же, для оборудования 25 тыс. квартир кухонной мебелью и встроенными 
шкафами 

	млн. руб.
 в год 
	3,3 
	6 
	4 
	4,5 
	5 
	
22 
	Цех древесно-волокнистых плит в составе: главного корпуса, рубительно- сортировочной станции со складом сырья и готовой продукции (однопоточное производство)
      
 	млн. м
 в год 
	5 и 10 
	5 
	2 
	3,5 
	5 
	
23 
	Цех древесно-волокнистых плит в составе: главного корпуса, рубительно- сортировочной станции со складом сырья и готовой продукции (однопоточное производство), на площадке действующего предприятия 
     
 	млн. м
 в год 
	5 и 10 
	4 
	1,5 
	3 
	5 
	
24 
	Предприятие древесно-волокнистых плит в составе: главного корпуса, рубительно-сортировочной станции и других объектов вспомогательного назначения (двухпоточное производство) 
	млн. м
  в год 
	20 
	6 
	3 
	4 
	7 
	
25 
	То же, на площадке действующего предприятия 
	млн. м
 в год
 
	20 
	5 
	2 
	3,5 
	7 
	
26 
	Цех стружечных плит в составе: главного корпуса с отделениями дереворубным и приготовления смол, складом сырья и готовой продукции, на площадке действующего предприятия     
 	тыс. м 
в год 
	12 
	4 
	1 
	3,5 
	4,5 

 	 
 	 
 	25 

	4,5 
	1,5 
	4 
	5 

 	 
 	  
 	50 

	4,5 
	2 
	4 
	6 
	
27 
	Предприятие стружечных плит в составе: главного корпуса с отделениями дереворубным и приготовления смол и объектов вспомогательного назначения (двухпоточное производство) 
	тыс. м
  в год 
	100 
	6 
	2 
	5 
	7 
	
28 
	Предприятие по производству газетной бумаги в составе двух бумагоделательных машин, каждая рабочей шириной 6720 мм и с рабочей скоростью 750 м в минуту 

	тыс. т в год 
	228 
	14 
	10 
	10 
	10 
	
29 
	То же, в составе четырех машин 
     
 	тыс. т в год 

	456 
	18 
	12 
	12 
	12 
	
30 
	Предприятие по производству писчей и типографской бумаги N 1 и 2, в составе двух бумагоделательных машин, каждая рабочей шириной 6300 мм и с рабочей 
скоростью 500-600 м в минуту 
	тыс. т в год 
	185 
	14 
	10 
	10 
	10 
	
31 
	То же, в составе четырех машин 
	тыс. т в год 

	370 
	18 
	12 
	12 
	12 
	
32 
	Предприятие по производству мешочной бумаги в составе двух бумагоделательных 
машин, каждая рабочей шириной 6300 мм и с рабочей скоростью 600 м в минуту 

	тыс. т в год 
	280 
	16 
	10 
	11 
	10 
	
33 
	То же, в составе четырех машин 
	тыс. т в год 

	560 
	18 
	12 
	12 
	12 
	
34 
	Предприятие по производству оберточно-упаковочной бумаги (весом 50 г/м) в составе бумагоделательных машин 
    
 	тыс. т в год 
	От 270  до 280 
	16 
	10 
	11 
	10 
	
35 
	Предприятие по производству тарного картона в составе двух картоноделательных машин, каждая рабочей шириной 6300 мм; одна машина для наружного картона с рабочей скоростью 390 м в минуту, производительностью 286 тыс. т в год и одна машина по производству картона для гофрирования с рабочей скоростью 350 м в минуту, производительностью 162 тыс. т в год 
	тыс. т в год 
	448 
	18 
	12 
	12 
	12 
	
36 
  
 	Предприятие по производству тарного картона из камыша в составе двух картоноделательных машин, каждая рабочей шириной 4200 мм 

	тыс. т  в год 
  
 	140 
  
 	12 
  
 	9 
  
 	10 
  
 	10 

37 
	Предприятие по производству товарной, растворимой с предгидролизом, сульфатной целлюлозы, с варочными котлами и двумя сушильными машинами, каждая рабочей шириной 4200 мм 
     
 	тыc. т в год 
	200 
	14 
	10 
	10 
	10 
	
38 
	Предприятие по производству товарной сульфатной, беленой целлюлозы, с установками непрерывного действия и 
четырьмя сушильными машинами, каждая рабочей шириной 4200 мм 
     
 	тыс. т в год 
	500 
	18 
	12 
	12 
	12 
	
39 
	Предприятие по производству коробочного картона из макулатуры и привозных полуфабрикатов с одной картоноделательной машиной рабочей шириной 4200 мм 
	тыс. т в год 
	70 
	10 
	6 
	8 
	8 
	
40 
	Предприятие по производству коробочного картона из макулатуры и привозных полуфабрикатов с двумя машинами 
	тыс. т в год 
	140 
	10 
	6 
	8 
	9 
	
41 
	Предприятие гидролизно-дрожжевое на основе древесного сырья с производством белковых кормовых дрожжей     
 	тыс. т в год 
	14 
	9 
	6 
	8 
	8 

 	 
 	
	28 

	9 
	6 
	8 
	8 
	
42 
	То же, на основе отходов сельского хозяйства 
	тыс. т в год 

	10 
	7 
	4 
	7 
	8 
	
43 
	Предприятие гидролизно-фурфурольное на основе отходов сельского хозяйства или древесного сырья с производством фурфурола 
	тыс. т в год 
	5 
	7 
	4 
	7 
	8 
	
44 
	Предприятие сухой перегонки древесины в составе ретортного и лесохимического цехов и газогенераторной станции с выпуском уксусной кислоты 2,7 тыс. т и переработкой древесины (пар и электроэнергия получаются извне) 
	тыс. м
 в год 
	150 
	8 
	3 
	6 
	8 
	
45 
	Предприятие канифольно-экстракционное по переработке пневого осмола на канифоль, скипидар и флотационное масло в составе измельчительного отделения и канифольно- экстракционного цеха (пар и электроэнергия получаются заводом извне)
      
 	тыс. м
  в год 
	150 
	8 
	3 
	6 
	8 
	
46 
	Предприятие канифольно-экстракционное по переработке пневого осмола на канифоль, скипидар и флотационное масло в составе измельчительного и канифольно- экстракционноных цехов. Предусмотрено использование проэкстрагированной щепы (пар и электроэнергия получаются заводом извне) 
	тыс. м
  в год 
	Складских 300 
	10 
	3 
	8 
	10 
	
47 
	Энергохимическая установка полной газификация древесных отходов (в составе завода), состоящая из двух газогенераторов со складом ЛБЖ        
 	тыс. м
  
 	50 
	5 
	-
 	5 
	6 

Примечания:  1. К лесозаготовительным относятся предприятия без переработки и с переработкой, долговременного действия и постоянного действия, без подсочки леса и с подсочкой, независимо от транспорта и пункта примыкания, c учетом проектирования мероприятий по лесному хозяйству. 

2. По лесосплавным предприятиям при применении в проектах улучшения сплавных путей, регулирования стока, а также водоподъемных или опускных плотин, волнозащитных сооружений, сложных опор запаней, мелехранилищ, по согласованию с заказчиком проекта применяется коэффициент: на стадии проектного задания до 1,2 и на стадии рабочих чертежей до 1,25. 

3. При разработке проекта организации сплава по бассейну (магистральная река с притоками) по согласованию с заказчиком проекта применяется коэффициент до 1,25. 

                
 
XII. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих 
чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Прядильно-ткацкая фабрика - прядильных веретен 
	тыс. шт.
 	120 
	6,5 
	2,5 
	5 
	8 
	
2 
	Хлопкопрядильная фабрика - прядильных веретен 
	то же 
	От 60 до 120 
	6,5 
	2,5 
	5 
	6 
	
3 
	Хлопкоочистительный комбинат - джин 
	шт.
 	4 
	6,5 
	2,5 
	5 
	6 
	
 4 
	Камвольно-суконный комбинат прядильных веретен 
	тыс. шт.
 	От 80 до 90 

	8 
	3 
	6 
	9 
	
5 
	Шерстепрядильная фабрика 
- прядильных веретен 
	то же 
	50 
	6 
	2 
	5 
	7 
	
6 
	Фабрика первичной обработки шерстомоечных агрегатов 
	шт.
 	От 3 до 5 
	6 
	2 
	5 
	7 
	
7 
	Комбинат шелковых тканей из искусственного шелка - станков 
	то же 
	3000 
	8 
	3 
	6 
	10 
	
8 
	Комбинат шелковых тканей из штапельного волокна - прядильных веретен 
	тыс. шт.
 	От 260 до 270 
	8 
	3 
	6 
	10 
	
9 
	Комбинат костюмных тканей из штапельного волокна - прядильных веретен 
	то же 
	От 80 до 90 
	8 
	3 
	6 
	10 
	
10 
	Завод первичной обработки льна-льносоломы 
	тыс. т в год 
	6 
	6 
	2 
	5 
	6 
	
11 
	Фабрика чулочных изделий 
	млн. пар.
 в год 

	30 
	6 
	2 
	5 
	6 
	
12 
	Фабрика бельевого трикотажа 
	млн. шт.
 в год
 
	17 
	6 
	2 
	5 
	6 
	
13 
	Фабрика верхнего трикотажа 
	то же 
	6 
	6 
	2 
	5 
	6 
	
14 
	Швейная фабрика универсальных швейных машин 
	то же 
	120-220 
	5 
	2 
	4 
	5 
	
15 
	Завод жестких кож 
	т в год 
	От 1700 
до 4500
 
	5 
	2 
	4 
	6 
	
16 
	Завод хромовых кож 
	млн. дм
 в год
                                                                         
 	От 90 до 200 
	5 
	2 
	4 
	6 
	
17 
	Обувная фабрика 
	млн. пар 
в год 

	От 3 до 6 
	5 
	2 
	4 
	6 

XIII. ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих 
чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Свеклосахарный завод (с жомосушильным и сепарационным отделениями) переработки свеклы     
 	тыс. ц в сутки 
	15 
	7 
	2 
	5 
	4 

 	  

 	30
 
	9 
	3 
	6 
	4 
	
2 
	Консервный завод 
	млн. учетных банок в год 
	От 5 до 10 
	5 
	2 
	3 
	3 

 	  

 	20 

	5 
	2 
	3 
	4 

 	  

 	30 

	5 
	2 
	3 
	4 

 	  

 	50 

	7 
	3 
	4 
	4 

 	  

 	70 

	7 
	3 
	4 
	4 

 	  

 	150 
	9 
	4 
	5 
	5 

3 
	Маслоэкстракционный завод - переработки семян      
 	т в сутки 
	200 
	8 
	3 
	6 
	7 

 	 

	400 

	9 
	3 
	7 
	8 
	
4 
	Маргариновый завод 
	тыс. т в год 
	6 
	6 
	2 
	4 
	5 

 	 

 	12 

	7 
	2 
	5 
	6 

 	  

 	20 

	8 
	2 
	6 
	7 
	
5 
	Цех туалетного мыла 
	тыс. т в год 
	6,5 

	4 
	1 
	3 
	4 

 	  

	13 

	4 
	1 
	3 
	5 

 	  

 	19,5 
	4 
	1 
	3 
	5 

6 
	Завод по выработке синтетических моющих средств 
	тыс. т в год 
	30 
	8 
	2 
	6 
	6 
	
7 
	Мясокомбинат производственной мощностью: 

	

	

	  

	  

	

	

	мяса животных 
мяса птицы 
переработки мяса 
хранения мороженного мяса 

	

2,5 

6 

5  

8 
	Мясокомбинат производственной мощностью: 

	

 

      

	

	

	

	мяса животных 
мяса птицы
 
переработки мяса 
хранения мороженного мяса 

	

3  

7  

6  

  9 
	Мясокомбинат производственной мощностью:

 

	

	 

      

	

	

	

	мяса животных 
мяса птицы 
переработки мяса 
хранения мороженного мяса 

	

3 

8  

7  

10 
	Мясокомбинат производственной мощностью: 

	

	

 	

	

	

	

	мяса животных 
мяса птицы 
переработки мяса 
хранения мороженого мяса 

	т в смену

т 

	100
 
20
 
25
 
4000  

 

3  

9  

8  

11 
	Птицекомбинат производственной мощностью:

 

 	  

 	  

 	переработки 
мяса птицы                               
 с холодильником емкостью 
	т в смену
 т
   
 	10  
 300 
	 7 
	2  
 	5  
 	5  
 	
12 
	Птицекомбинат: 

 	  

 	  

 	переработки 
мяса птицы                               
 с холодильником емкостью 
	т в смену
 т 
	 20  
 600 
	8  
 	2  
 	6  
 	6  
 	
13 
	Птицефабрика - клеточных
 несушек      
 	тыс. шт.
 	50 
	7 
	2 
	5 
	5 

 	 

	  
 	100 
	8 
	2,5 
	6 
	6 
	
14 
	 Мясоперерабатывающий завод: 

 	  

 	  

 	переработки мяса                 
 с холодильником емкостью 
	т в смену
 т 
	 10   
 300 

	6,5 
	2 
	4,5 
	5 

 	
	
	 20   
 600 

	 7 
	2  
 	  5 
	  6 

 	  

 	 40   
 1200 

	8 
	2 
	6 
	7 
	
15 
	 Мясоперерабатывающий цех 
	т в смену 

	От 3 до 40 
	4 
	1 
	3 
	4 
	
16 
	Утильзавод кормовой муки 
	т в смену 

	От 1 до 2 
	3,5 
	1 
	2,5 
	3 
	
17 
	Перо-пуховая фабрика 
	т в год 

	2000 
	6 
	2 
	4 
	5 
	
18 
	Цех по производству яичного порошка 
	т в смену
 
	От 1 до 2 
	4 
	  -
 	4 
	5 
	
19 
	Цех по производству меланжа 
	т в смену
  
 	От 5 до 10 
	4 
	  -
 	4 
	5 
	
20 
	Городской завод переработки молока      
 	т в смену 
	От 10 до 50 
	5 
	2 
	3 
	6 

 	

 	От 100 до 200 

	6 
	2,5 
	3,5 
	8 

 	  

 	300 

	7 
	3 
	4 
	9 
	
21 
	Завод сухого молока -  переработки молока 
	т в смену
 
	От 100 до 200 
	7 
	3 
	4 
	7 
	
22 
	 Молочноконсервный завод - переработки молока 
	т в смену 

	50 
	7 
	3 
	4 
	7 

 	

	100 

	7 
	3 
	4 
	8 
	
23 
	Сыродельный завод - переработки молока      
 	т в смену 
	25 
	4,5 
	2 
	2,5 
	5 

 	 

 	50 

	5 
	2 
	3 
	5 

 	  

 	100 
	5,5 
	2,5 
	3 
	6 

24 
	Завод сухого обезжиренного молока и масла - переработки молока     
 	т в смену 
	25 
	4 
	2 
	2 
	4 

 	 

 	50 

	4,5 
	2 
	2,5 
	5 

 	 

 	100 

	5 
	2,5 
	2,5 
	6 
	
25 
	Пристанционно-
 пришоссейный завод переработки молока 
	т в смену 
	От 25 до 50 

	4 
	2 
	2 
	3 

 	 

	100 

	4,5 
	2,5 
	2 
	4 
	
26 
	Маслосырбаза (холодильник) - единовременного хранения   
 	т 
	500 
	4 
	2 
	2 
	5 

 	

 	1000 

	4,5 
	2 
	2,5 
	5,5 

 	

 	2000 

	5,5 
	2,5 
	3 
	6 
	
27 
	Винодельческий завод по переработке винограда     
 	т в сутки 
	100 
	3 
	1 
	2 
	2 

 	 

	200 

	3 
	1 
	2 
	2 

 	 

 	500
  
 	4 
	1 
	3 
	2 

 	  

 	750
  
 	5 
	2 
	3 
	2 

 	  

 	1000
  
 	5 
	2 
	3 
	2 

 	  

	  
 	1500 
	6 
	2 
	4 
	2 
	
28 
	Винный завод городского типа 
	тыс. дкл 
в год 
	600 
	3 
	1 
	2 
	1 

 	

 
	1500 
	4 
	1 
	3 
	2 

 	  

 	2500 
	5 
	2 
	3 
	3 

29 
	Завод шампанских вин -  бутылок емкостью 0,8 л 
	млн. шт.
 в год 
	1,6 
	3 
	1 
	2 
	2 

 	 

	3,2 

	5 
	2 
	3 
	2 

 	 

 	4,8 
	6 
	2 
	4 
	3 

30 
	Коньячный завод - коньячного спирта а/а 
	тыс. дкл 
в год 
	50 
	2 
	1 
	1 
	1 

 	
	
	100 

	3 
	1 
	2 
	2 

 	  

 	200 

	4 
	2 
	2 
	2 
	
31 
	Цех виноградного сока 
	тыс. дкл 
в год 
	25 
	2 
	1 
	1 
	2 

 	 

 	50 

	2 
	1 
	1 
	2 

 	  

 	100 

	2 
	1 
	1 
	2 

 	  

 	200 

	2 
	1 
	1 
	2 

 	  

 	400 

	3 
	1 
	2 
	2 

 	  

 	600 

	3 
	1 
	2 
	2,5 
	
32 
	Пивоваренный завод 
	тыс. дкл 
в год 
	350 
	3 
	1 
	2 
	2 

 	  

	680 

	3 
	1 
	2 
	2 

 	  

 	1000 

	3 
	1 
	2 
	2,5 

 	  

 	1800 

	4 
	1 
	3 
	2,5 

 	  

 	3000 

	5 
	2 
	3 
	3 
	
33 
	Хлебопекарня - формового хлеба 
	т в сутки 

	3 
	3,5 
	1 
	2,5 
	3 

 	 

	6 

	3,5 
	1 
	2,5 
	3 

 	  

 	12 
	4 
	2 
	2 
	4 

34 
	То же (с цехом выпуска 50 кг тортов и пирожных в смену) 
	т в сутки 
	12 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
35 
	Хлебопекарня (с цехом выпуска 75 кг тортов и пирожных в смену) 
	т в сутки 
	18 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
36 
	Хлебозавод - формового хлеба 
	т в сутки 

	30 
	4 
	2 
	3 
	4 

 	 

 	60 

	5 
	2 
	4 
	5 

 	  

 	100 
	6 
	2 
	4 
	5 

37 
	То же (с цехом выпуска 125 кг тортов и пирожных и линией для производства 1 т мелкоштучных сдобных изделий и 1 т заварных пряников в смену) 
	т в сутки 
	30 
	5 
	2 
	3 
	4 
	
38 
	То же (с цехом выпуска 250 кг тортов и пирожных и линией для производства 2 т мелкоштучных сдобных изделий и 1 т заварных пряников в смену) 
	т в сутки 
	60 
	6 
	2 
	4 
	5 
	
39 
	Цех бараночных изделий 
	т в сутки 

	3 
	4 
	2 
	3 
	4 

 	

	
	9 
	5 
	2 
	3,5 
	5 
	
40 
	Цех сдобных сухарных изделий 
	т в сутки
 
	3 
	4 
	2 
	3 
	4 
	
41 
	Завод сырого или сухого картофельного крахмала - переработки картофеля      
 	т в сутки 
	25 
	2 
	1 
	1 
	1,5 

 	 

 	50 

	2 
	1 
	1,5 
	1,5 

 	 

 	100
  
 	2,5 
	1 
	2 
	2 
	
42 
	Завод сухого крахмала из кукурузы - переработки 
	т в сутки 

	100 
	4 
	2 
	2 
	2,5 
	
43 
	Завод патоки из кукурузы - переработки кукурузы 
	т в сутки 

	100 
	4 
	2 
	2 
	2,5 
	
44 
	Дрожжевой завод - пекарских дрожжей 
	т в год 

	700 
	2,5 
	1 
	1,5 
	2 

 	 

	2500 

	3 
	1 
	2 
	2 

 	  

	  
 	6000 
	3,5 
	1 
	2,5 
	3 
	
45 
	Кондитерская фабрика 
	тыс. т в год 

	10 
	5 
	2 
	3 
	4 

 	

	
	20 
	6 
	2 
	4 
	5 
	
46 
	То же (с цехами халвы и первичной переработки какаобобов) 
	тыс. т в год 
	20 
	7 
	2 
	5 
	5 

XIV. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

 	  

 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 

1 
	Завод по выработке  рыбной продукции 
	тыс. ц в год 

	8 
	4,5 
	2 
	3 
	5 

 	 

	15 

	5 
	2,5 
	3 
	6 

 	  
 	  
 	30 
	5,5 
	3 
	3 
	7 

2 
	  Завод по выработке рыбных консервов (2 смены) 
	млн. усл.
 банок в год 
тыс. усл.
 банок в смену 
	 5  
 10 
	4,5 
	2 
	3 
	5 

 	  
 	
	10 
20 

	5 
	2 
	3,5 
	6 

 	  
 	  
 	15 
30 

	5 
	2 
	3,5 
	6 

 	  
 	  
 	20 
40 

	5,5 
	2,5 
	4 
	7 

 	  
 	  
 	30 
60
  
 	6 
	2,5 
	4,5 
	8 
	
3 
	  Завод по выработке рыбных консервов (3 смены) 
	млн. усл.
 банок в год 
тыс. усл.
 банок в смену 

	 40  
 120 
	7 
	3 
	5 
	10 
	
4 
	  Завод по выработке кормовой рыбной муки - переработки сырья      
 	т в год 
т в сутки 
	3000 
15 
	4 
	2 
	3 
	3 

 	  

   
 	6000
 30 

	4,5 
	2,5 
	3 
	4 

 	  
 	  
 	10000
 50 

	5,5 
	3 
	4 
	5 

XV. ХОЛОДИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Распределительный холодильник: 

 	  

 	  

 	одноэтажный 
	т 
	До 600 

	4 
	2 
	3 
	5 

 	  
 	  
 	До 1500
  
 	4,5 
	2 
	3,5 
	6 

 	  
 	  
 	До 3500
  
 	5 
	3 
	4 
	7 

 	  
 	  
 	До 6000
  
 	5,5 
	3 
	4,5 
	8 

 	многоэтажный 
	  
 	10000 

	7 
	3,5 
	5 
	8 

 	  
 	  
 	До 16000
  
 	7 
	3,5 
	5,5 
	8,5 
	
2 
	Фабрика мороженого 
	т в смену
 
	3-8 
	4 
	2 
	4 
	6 
	
3 
	  Завод сухого льда 
	т в сутки
 
	2,2 и 4,4 
	4 
	2 
	4 
	6 

XVI. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

								
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Промышленная ферма молочного направления с беспривязным содержанием коров      
 	голов 
	200 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	

 	От 400 до 800 

	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	 

 	До 1200
  
 	3,5 
	1 
	2,5 
	3,5 
	
2 
	Племенная ферма молочного направления с привязным содержанием коров      
 	голов 
	200 
	2,5 
	1 
	2 
	3 

 	 

 	От 400 до 800 

	3 
	1 
	3 
	3,5 
	
3 
	Ферма мясного направления с беспривязным содержанием крупного рогатого скота      
 	голов 
	От 200 до 400 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	 

 	От 600 до 800 

	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	 

 	От 1200 до 1600
  
 	3 
	1 
	2,5 
	3,5 
	
4 
	Ферма по выращиванию ремонтного молодняка, доращиванию и откорму (на силосе) молодняка крупного рогатого скота     
 	голов 
	От 500 до 1000 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	

 	От 2000 до 6000 

	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	 

 	От 9000 

	3,5 
	1,5 
	3 
	3,5 
	
5 
	Свиноводческая ферма с законченным оборотом стада при групповом содержании подсосных свиноматок, манежным воспитанием сосунов и крупногрупповом содержании откорма - основных свиноматок      
 	голов 
	От 100 до 300 
	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	

 	От 300 до 600 

	3,5 
	1 
	3 
	3,5 
	
6 
	Репродукторная свиноферма с групповым содержанием подсосных свиноматок и манежным воспитанием сосунов основных свиноматок  
 	голов 
	100 
	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	 

 	От 200 до 600 

	3 
	1 
	2,5 
	3,5 
	
7 
	Откормочная свиноферма с крупногрупповым свободно- выгульным содержанием свиней      
 	тыс. голов 
	От 3  до 6 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	

	От 6  до 24 

	3,5 
	1 
	3 
	3,5 
	
8 
	Овцеводческая ферма со стойлово- пастбищным и круглогодовым стойловым содержанием овец (по выходному поголовью)     
 	тыс. голов 
	От 2 до 5 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	

	От 5  до 15 

	3 
	1 
	2,5 
	3 
	
9 
	Птицеферма при содержании кур- несушек на глубокой подстилке (несменяемой)     
 	тыс. голов 
	20 
	3 
	1 
	2,5 
	3 

 	

	30 

	3,5 
	1 
	3 
	3,5 
	
10 
	Ферма по выращиванию уток на мясо при содержании на водоемах (с маточным стадом) 
	тыс. голов 
	125 
	3,5 
	1 
	3 
	4 

 	

 	250 

	4 
	1 
	3,5 
	5 

 	

 	500
  
 	4,5 
	1 
	4 
	6 
	
11 
	Ферма по выращиванию уток на мясо при содержании без водоемов (с маточным стадом)     
 	тыс. голов 
	От 125 до 250 
	3,5 
	1 
	3 
	4 

 	 

 	От 500 до 1000 

	4,5 
	1 
	4 
	4,5 
	
12 
	Ферма по выращиванию гусят на мясо (с маточным стадом) 
	тыс. голов 
	30 
	2,5 
	1 
	2 
	3,5 
	
13 
	Ферма по выращиванию индюшат на мясо (с маточным стадом)     
 	тыс. голов 
	50-60 
	3 
	1 
	2,5 
	3,5 

 	

	От 75 до 125 

	3 
	1 
	2,5 
	4 

 	

 	От 250 до 300
  
 	5 
	1 
	4 
	5 
	
14 
	Кролиководческая ферма с поголовьем самок основного стада 
	голов 
	400 
	1,5 
	1 
	1 
	2 
	
15 
	Звероводческая ферма с поголовьем самок основного стада      
 	голов 
	От 100 до 300 
	1,5 
	1 
	1 
	2 

 	 

 	От 1200 до 1500
  
 	2 
	1 
	1,5 
	2,5 

 	

 	2500 

	2,5 
	1 
	2 
	3 
	
16 
	Коровник для ферм молочного или мясного направления с беспривязным содержанием коров 
	голов 
	От 200 до 400 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
17 
	Коровник для племенных ферм с привязным содержанием коров 
	голов 
	От 200 до 400 
	1,5 
	0,5 
	1 
	  1,5 
	
18 
	Здания для содержания ремонтного молодняка, доращивания и откорма, а также здания для содержания крупного рогатого скота на откормочных пунктах 
	голов 
	500 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
19 
	Блок помещений родильного отделения, телятника и профилактория для ферм молочного направления с поголовьем коров 
	голов 
	От 200 до 1200 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
20 
	Помещения молочно-доильного блока для ферм молочного направления с поголовьем коров     
 	голов 
	От 200 до 800 

	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

 	

 	1200 

	1,5 
	0,5 
	1 
	2 
	
21 
	Свинарник-маточник для опороса свиноматок 
	голов 
	От 100 до 600 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
22 
	Свинарник-откормочник с крупногрупповым свободно- выгульным содержанием свиней 
	тыс. голов 
	От 1 до 3 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
23 
	Овчарня - кошара - маток 
	тыс. голов 

	От 0,3 до 1 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
24 
	Пункт искусственного осеменения с помещением для баранов производителей и ремонтных баранчиков для ферм с поголовьем овцематок 
	тыс. голов 
	От 2 до 15 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
25 
	Птичник для кур при содержании на глубокой (несменяемой) подстилке или кур-несушек в клетках 
	тыс. голов 
	От 5 до 10 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
26 
	Птичник-акклиматизатор 
	тыс. голов 

	10 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
27 
	Кормоцех для свиноводческих ферм 
	тыс. голов
 
	От 1 до 18 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
28 
	Кормоцех для фабрик по выращиванию цыплят (бройлеров)     
 	млн. голов 
	От 0,1 до 2 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

 	 

 	От 3 до 4 

	1,5 
	0,5 
	1 
	2 
	
29 
	Склад минеральных удобрений со складом ядохимикатов 
	т 
	От 250 до 4000 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
30 
	Птичник для выращивания мясных цыплят (бройлеров) на глубокой подстилке 
	тыс. голов 
	От 10 до 20 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
31 
	Кормоцех для птицеводческих ферм 
	тыс. голов
 
	До 200 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
32 
	Хранилище для продовольственного фуражного зерна, кукурузы в початках, семян зерновых, бобовых и масличных культур с применением передвижных или стационарных средств механизации складских операций 
	т 
	От 250 до 5000 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
33 
	Хранилище для картофеля и корнеплодов с применением передвижных или стационарных средств механизации складских операций 
	т 
	От 250 до 5000 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
34 
	Хранилище для овощей и фруктов с применением передвижных средств механизации складских операций 
	т 
	От 50 до 5000 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
35 
	Сушилка для зерна, кукурузы в початках и технических культур производительностью 
	т в час 
	От 1 до 5 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
36 
	Сушилка для овощей и плодов производительностью 
	кг в сутки
  
 	От 100 до 500 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 
	
37 
	Тепличное хозяйство с соотношением инвентарной площади зимних теплиц к площади весенних теплиц и обогреваемому грунту 1:4 - зимних теплиц      
 	тыс. м 
	5 
	2,5 
	1 
	2 
	2,5 

 	 

 	10 

	3 
	1,5 
	2,5 
	3 

 	

 	15
  
 	4 
	2 
	3 
	3 

 	

 	20
  
 	4,5 
	2 
	3,5 
	3,5 
	
38 
	Бригадное нефтехранилище и нефтебаза с общей емкостью резервуаров      
 	м 
	От 10 до 20 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

 	
	  
 	От 150 до 400 

	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

 	
	  
 	600 
	1,5 
	0,5 
	1 
	2 

 	
	  
 	От 1000 до 1200 

	2 
	0,5 
	1,5 
	2 
	
39 
	Пункт технического обслуживания, ремонта и хранения сельскохозяйственной техники с количеством обслуживаемых тракторов и комплектов сельскохозяйственных машин  
 	шт.
 	5 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

 	

 	25 

	1,5 
	0,5 
	1 
	2 

 	

 	От 50 до 60 

	2 
	0,5 
	1,5 
	2,5 

 	 

 	От 100 до 150 

	2 
	1 
	1,5 
	3,5 
	
40 
	Совхозная, колхозная, участковая или районная ветеринарная лечебница 
	объект 
	1 
	1,5 
	0,5 
	1 
	2 
	
41 
	Ветеринарный фельдшерский пункт      
 	объект 
	1 
	1,5 
	0,5 
	1 
	1,5 

Примечание. За источник водоснабжения в нормах принята буровая скважина на воду в районах с изученной гидрогеологией. 

XVII. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ И АВТОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица изме- рения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих 
чертежей, необходимых 
для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Железная дорога нормальной колеи СССР с полным комплексом устройства и постоянных сооружений на тепловозной тяге (новая) 
	км 
	До 50 
	5 
	3 
	3 
	4 

 	 
 	  
 	От 50 до 150 

	7 
	4 
	4 
	5 

 	

 	От 150 до 300 
	9 
	5 
	5 
	6 

 	

 	От 300 до 450 
	11 
	6 
	6 
	7 
	
2 
	То же (второй путь)
 	км 
	До 50 

	5 
	3 
	3 
	4 

 	  

 	От 50 до 150
  
 	7 
	4 
	4 
	5 

 	  

 	От 150 до 300
  
 	8 
	5 
	5 
	6 

 	  

 	От 300 до 450
  
 	10 
	6 
	6 
	6 

3 
	Электрификация существующей двухпутной дороги 
	  км 
	До 50 
	6 
	3 
	4 
	3 

 	
	  
 	От 50 до 150 

	8 
	4 
	5 
	4 

 	
	  
 	От 150 до 300
  
 	10 
	5 
	6 
	5 

 	  
 	  
 	От 300 до 450 
	12 
	6 
	8 
	6 

Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования электрификации существующей дороги, применяемая для работ, непосредственно связанных с заменой паровой или тепловозной тяги -  электрической (на постоянном или переменном токе) на двухпутных участках дорог, изменяется по согласованию с заказчиком при следующих факторах с коэффициентами: 

для однопутных участков до 0,9; 

при смешанном или моторовагонном движении для линий протяжением до 100 км до 1,2 ; свыше 100 км 1,1; 

при совмещенных подстанциях, если нагрузки районных потребителей электроэнергии превышают 25% мощности тяговой нагрузки, а также при проектировании защиты и переустройства линий связи Министерства связи и других ведомств до 1,2. 

2. Нормативная продолжительность проектирования увеличивается по согласованию с заказчиком при грузонапряженности новых дорог более 20 млн. ткм/км или вторых путей более 30 млн. ткм/км до 1,2. 

3. При проектировании строительства новых дорог или вторых путей на электрической тяге принимаются нормы продолжительности проектирования дорог с тепловозной и паровозной тягой с добавлением нормы на проектирование электрификации соответствующей дороги с 0,25. 

 	
4 
	Средний и большой мост под железную и автомобильную дорогу      
 	м 
	От 20 до 100 
	4 
	2 
	2 
	3 

 	 

 	От 100 до 300 
	5 
	3 
	2 
	4 

 	 
 	  
 	От 300 до 600 
	7 
	4 
	3 
	5 

Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования дана для моста под один железнодорожный путь широкой колеи или под две полосы движения автодороги с подходами к ним. 

2. Нормами не предусматривается срок проектирования наплавного, висячего, разводного моста, моста с совмещенным движением, а также моста в городских условиях. 

3. К нормативной продолжительности проектирования применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,2  в случаях проектирования мостов под два и более пути или более двух полос автомобильного движения, а также для моста, располагаемого на горизонтальных кривых или косых в отношении продольной оси. 

4. Нормативная продолжительность проектирования моста приведена для II категории сложности. Для других категорий применяются следующие коэффициенты: 

I категория (простые топографические, геологические и гидрогеологические условия, высота насыпи подходов до 10 м, опоры и основания простой конструкции, применение типовых пролетных строений) - до 0,6; 

III категория (сложные топографические, геологические и гидрогеологические условия, индивидуальное проектирование оснований и опор, высокие насыпи, проектирование индивидуальных пролетных строений) - до 1,5. 

	
5 
	Линия метрополитена подземная или наземная с необходимыми путевыми, электро- и санитарно-техни- ческими устройствами      
 	км 
	До 2 
	5 
	3 
	3 
	2 

 	 

 	От 2 до 5 
	8 
	5 
	5 
	3 

 	

 	От 5 до 8 
	10 
	6 
	7 
	4 

 	 На каждый 1 км свыше 8 км добавляется 
	  -
 	  -
 	1 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	
6 
	Транспортный туннель железно- или автодорожный с необходимыми для эксплуатации электро- и санитарно-техническими 
устройствами     
 	км 
	До 0,5 
	4 
	3 
	2 
	1 

 	

 	От 0,5 до 1 

	5 
	3 
	3 
	1,5 

 	На каждый 1 км свыше 1 км добавляется 
	-  
 	  -
 
	1 
	1 
	0,5 
	0,5 
	
7 
	Автоблокировка при всех видах тяги с электрической централизацией промежуточных станций на двухпутных и однопутных участках 
	км 
	До 150 
	4 
	2 
	2 
	6 

 	На каждые 50 км свыше 150 км добавляется 
	  -
 	  -
 	1 
	1 
	1 
	1 
	
8 
	Диспетчерская централизация при всех видах тяги с электрической централизацией промежуточных 
станций на однопутных участках на один диспетчерский круг 
	объект 
	1 
	4 
	2 
	2 
	6 
	
9 
	Электрическая централизация при всех видах тяги на двухпутных и однопутных участках с количеством централизуемых стрелок на станциях 
	шт.
 	До 70 
	4 
	2 
	2 
	5 

 	 
 	  
 	От 70 до 120 
	5 
	2 
	3 
	6 

Примечания: 1. При исчислении нормативной продолжительности проектирования одновременно двух диспетчерских кругов с одним постом диспетчерской централизации для второго круга применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 0,85. 

2. При проектировании устройств СЦБ с разработкой новых систем применяется по согласованию с заказчиком коэффициент - до 1,4 к норме соответствующих объектов. 

10 
	Новая внегородская автомобильная дорога II-III категории      
 	км 
	До 50 
	5 
	3 
	3 
	4 

 	 

 	От 50 до 150 

	7 
	4 
	4 
	5 

 	

 	От 150 до 300
  
 	9 
	5 
	5 
	6 

 	  

 	От 300 до 450
  
 	11 
	6 
	6 
	7 
	
11 
	То же, IV-V категории 
	км 
	До 25 

	4 
	2 
	2 
	3 

 	 
 	  
 	От 25 до 50
  
 	5 
	3 
	3 
	4 

 	  
 	  
 	От 50 до 150 
	7 
	4 
	4 
	5 

Примечания: 1. Нормативная продолжительность проектирования предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ с учетом необходимого объема жилищного строительства, находящегося в полосе отчуждения (без отдельно проектируемых поселков). 

2. Нормативная продолжительность проектирования на стадии проектного задания не учитывает время производства и обработки маршрутной аэрофотосъемки, необходимой для уточнения и дополнения топографических карт масштаба 1: 100000. 

3. Для железных и автомобильных дорог приняты следующие категории сложности (по новым дорогам): 

I категория - местность равнинная или слобо пересеченная, открытая или покрытая лесом до 50%; 

II категория - местность равнинная или пересеченная, залесенная более 50%; предгорная, залесенная до 50%; болота на протяжении до 30%; полупустынные районы; трассы по шоссейным и грунтовым дорогам вблизи городов; 

III категория - местность предгорная или сильно пересеченная, залесенная более 50% или горная; прижимные участки долин и ущельев; пустынные районы; барханные пески и дюны; болота на протяжении более 30%; тундры; местность сплошь залесенная, в таежных малообжитых районах; трассы по улицам городов и территориям промышленных предприятий; трассы внутри застроенной части квартала. 

Категория сложности определяется по характерным участкам местности. 

4. Нормативная продолжительность проектирования дана для II категории сложности местности; при I категории применяется коэффициент до 0,9 при проектном задании и рабочих чертежах и при III категории применяется коэффициент до 1,4 при проектном задании и до 1,2 при рабочих чертежах. 

            
XVIII. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

							
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	при одностадийном проектировании 

  

 	  
 	весь комплекс проектно- изыскательских работ 

	изыска- тельские работы 
	проектные работы 
	
1 
	Радиорелейная линия при одностадийном проектировании  
 	км 
	До 200 
	3 
	2 
	2 

 	
	  
 	От 200 до 300
 
	4 
	3 
	2 

Продолжение

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица изме- рения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

	  
 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 

 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тельские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих 
чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Радиорелейная линия 
	км 
	От 500 до 1000 

	5 
	3 
	3 
	3 

 	 

 	От 1000 до 1500
  
 	7 
	4 
	4 
	4 

 	  

 	От 1500 до 2500
  
 	8 
	5 
	5 
	5 

 	  

 	От 2500 и более 
	10 
	6 
	5 
	6 

Примечания: 1. Нормы продолжительности проектирования РРЛ составлены для линий с аппаратурой типа Р-600. 
            
2. Нормативная продолжительность проектирования радиорелейных линий с применением аппаратуры Р/60-120 для проектных работ принимается по согласованию с заказчиком с коэффициентом до 0,6. 

 	
3 
	Радиоцентр передающий, вещательный, мощностью   
 	кВт 
	До 100 
	5 
	3 
	3 
	3 

 	 

 	"   200 

	6 
	3 
	3 
	3 

 	 

 	"    500 

	7 
	4 
	4 
	4 

 	  

 	"  1000 
	8 
	4 
	5 
	5 

4 
	Радиоцентр передающий, связный, мощностью     
 	кВт 
	До 200 
	6 
	3 
	3 
	3 

 	

 	"   500 

	7 
	4 
	4 
	4 

 	 

 	"   1000
  
 	8 
	4 
	5 
	5 
	
5 
	Радиоцентр приемный, с техконтролем на 3-6 рабочих мест 
	число связей 
	До 45 
	6 
	4 
	3 
	3 
	
6 
	То же, с техконтролем на 4-8 рабочих мест      
 	число связей 
	До 90 
	8 
	5 
	4 
	3 

Примечание. Нормативная продолжительность проектирования совмещенных радиоцентров (связных и вещательных) принимается по нормам вещательных. 

 	
7 
	Телецентр однопрограммный II, III и IV класса 
	объект 
	1 
	3 
	2 
	1,5 
	2,5 
	
8 
	То же, I класса 

	объект 
	1 
	4 
	2 
	2 
	3 
	
9 
	Перевод однопрограммного телецентра II класса на двухпрограммный 
	объект 
	1 
	2,5 
	1 
	1,5 
	2,5 
	
10 
	То же, I класса 

	объект 
	1 
	3 
	1 
	2 
	3 
	
11 
	Радиодом III и IV класса 
	объект 
	1 
	3 
	1,5 
	1,5 
	2 
	
12 
	То же, II класса 

	объект 
	1 
	4 
	2 
	2 
	3 
	
13 
	Ретрансляционная телевизионная станция 
	объект 
	1 
	3 
	1,5 
	1,5 
	2 
	
14 
	Передающая телевизионная станция 
	объект 
	1 
	3 
	1,5 
	1,5 
	2 
	
15 
	Кабельная магистраль с симметричным кабелем и уплотнением      
 	км 
	До 300 
	3 
	2 
	2 
	2 

 	

 	От 300 до 500 

	4 
	2 
	3 
	2 

 	

 	От 500 до 800
  
 	6 
	3 
	4 
	3 

 	  

 	От 800 до 1000
  
 	7 
	3 
	5 
	4 

 	  

 	От 1000 до 1200 
	9 
	4 
	6 
	5 

16 
	Кабельная магистраль с коаксиальным кабелем и уплотнением      
 	км 
	До 500 
	5 
	3 
	2 
	3 

 	 

 	От 500 до 900 

	7 
	4 
	4 
	4 

 	

 	От 900 до 1200
  
 	9 
	5 
	6 
	5 
	
17 
	Воздушная линия связи при постройке новой и реконструкции существующей линии, подвеска и уплотнение цепей      
 	км 
	До 300 
	3 
	1 
	2 
	3 

 	 
 	  
 	От 300 до 500 
	3 
	1,5 
	2 
	4 

 	 
 	  
 	От 500 до 800 
	5 
	2 
	3 
	5 

 	
	  
 	От 800 до 1200 
	5 
	2,5 
	3 
	6 
	
18 
	Уплотнение воздушной линии связи     
 	км 
	До 300 
	1,5 
	0,5 
	1 
	2,5 

 	 
 	  
 	От 300 до 500 
	3 
	1 
	2 
	3 

 	  
 	  
 	От 500 до 800 
	3 
	1 
	2 
	4 

 	  
 	  
 	От 800 до 1200 
	5 
	2 
	3 
	5 
	
19 
	Городская телефонная сеть районирования с автоматическими станциями     
 	номеров 
	До 3000 
	3,5 
	2,5 
	1,5 
	3 

 	
	  
 	От 3000 до 6000 
	4 
	3 
	1,5 
	4 

 	
	  
 	От 6000 до10000 
	5 
	3,5 
	2 
	5 
	
20 
	То же, нерайонированная 
	номеров 
	До 3000 
	2,5 
	1,5 
	1,5 
	3 

 	
	  
 	От 3000 до 6000 
	3,5 
	2,5 
	1,5 
	4 

 	  

	  
 	От 6000 до10000 
	4 
	3 
	1,5 
	4,5 
	
21 
	Междугородная телефонная станция (новая и реконструкция)     
 	связей 
	30-60 
	2 
	1 
	1 
	2,5 

 	 
 	  
 	80-110 
	2 
	1 
	1,5 
	3 

 	
	  
 	120-170 
	3 
	1,5 
	2,5 
	4 

 	  

 	200-320 

	4 
	2 
	3 
	5 
	
22 
	Генсхема радиотрансляционной сети 
    
 	объект 
	1 
	5 
	3 
	4 
	-
 	
23 
	Железнодорожный сортировочный почтамт (технология и задание): 

 	  

 	  

 	ЖДСП-1 
	посылок в сутки 
	1000 
	2 
	1 
	1 
	2 

 	ЖДСП-2 
	  
 	2000 
	2 
	1 
	1 
	2 

 	ЖДСП-3 

 	5000 
	2,5 
	1 
	1,5 
	2,5 
	
24 
	Отделение перевозки почты при аэропортах (технология и задание): 

 	  

 	  

 	АОПП-1 
	посылок 
в сутки  
 	200 
	2 
	1 
	1 
	1,5 

 	АОПП-2 
	  
 	500 
	2 
	1 
	1 
	2 

 	АОПП-3 
	  
 	2000 
	2,5 
	1 
	1,5 
	2,5 

 	АОПП-4 

 	5000 
	2,5 
	1 
	1,5 
	2,5 
	
25 
	Районные узлы связи для городов с населением     
 	тыс. чел.
 	До 3 
	2 
	1 
	1 
	1,5 

 	 

	От 3 до 5 

	2 
	1 
	1 
	1,5 

 	 

 	От 5 до 10 

	2,5 
	1 
	1,5 
	2 

 	  

	  
 	От 10 до 50 
	3 
	1 
	2 
	2,5 
	
26 
	Прижелезнодорожный почтамт (технологическая часть) - обрабатываемых посылок      
 	тыс. шт.
 в сутки 
	От 5 до 15 
	3 
	1 
	2 
	3 

 	

	От 15 до 40 

	4 
	1 
	3 
	4 

 	

 	От 40 и выше 

	5 
	1 
	4 
	5 
	
27 
	Газетно-журнальная экспедиция (технологическая часть) -  экземпляров газет и материалов 
	млн. шт.
 в сутки 
	До 2 
	2 
	0,5 
	1,5 
	2 

 	
	 
 	От 2 и более 

	2,5 
	0,5 
	2 
	2,5 

XIX. ПРЕДПРИЯТИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ
 (ЭЛЕВАТОРНО-МЕЛЬНИЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 

	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в месяцах)

  

 	  
 	на стадии проектного задания 

	

 	  
 	  
 	весь комплекс проектно- изыска- тельских работ 

	изыска- тель-
 ские работы 
	проект- ные работы 
	на стадии рабочих чертежей, необходимых для объектов одногодичного строительства или первого года строительства (включая изыскания)

1 
	Мельница сортового помола производительностью 
	т в сутки 
	От 30 до 60 
	3 
	1,5 
	1,5 
	2,5 
	
2 
	Мелькомбинат сортового помола с пневматическим транспортом продуктов производительностью 
	т в сутки 
	От 120 до 140 
	4 
	2 
	2,5 
	4,5 
	
3 
	Мелькомбинат с пневматическим транспортом продуктов 
производительностью 
сортового помола
 обойного помола 
	т в сутки 
	  От 180 до 220
 100 
	4,5  
 	2  
 	3  
 	5  
 	
4 
	То же, односекционный сортового помола 
	т в сутки 
	От 200 до 245 
	4,5 
	2 
	3 
	5 
	
5 
	Комбикормовый цех (производство россыпных и гранулированных комбикормов)     
 	т в сутки 
	130 
	4 
	2 
	2,5 
	4 

 	

	300 

	4,5 
	2 
	3 
	4,5 

 	

 	600 

	4,5 
	2 
	3 
	4,5 
	
6 
	Цех по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы 
	т в сезон 
	1500 
	3,5 
	2 
	2 
	3,5 
	
7 
	Заводы по обработке гибридных и сортовых семян кукурузы 
	т в сезон 
	От 2500 
до 6000 
	4 
	2 
	2,5 
	4 
	
8 
	Элеваторы 
	т в сезон
 
	До 7000 
	4 
	2 
	2,5 
	4,5 
	
9 
	Прирельсовый складской хлебоприемный пункт без элеватора     
 	т в сезон 
	22000 
	4 
	2 
	2,5 
	3,5 

 	

 	44000 

	4 
	2 
	2,5 
	4,5 
	
10 
	Неприрельсовый, глубинный, складской хлебоприемный пункт без элеватора 
	т в сезон 
	44000 
	4 
	2 
	2,5 
	4 
	
11 
	Прирельсовый элеваторно-складской хлебоприемный пункт     
 	т в сезон 
	45000 
	4 
	2 
	2,5 
	4,5 

 	

 	76000 

	4,5 
	2 
	3 
	5 

 	 

	  
 	100000 
	4,5 
	2 
	3 
	5 
	
12 
	Силосные корпуса 

	т 
	До 25000 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
13 
	Сушильно-очистительная башня (СОБ) 
	объект 
	1 
	2 
	1 
	1 
	2 
	
14 
	Зерносклады 
	т 
	До 11000 
	1 
	0,5 
	0,5 
	1,5 

Часть II
 
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДОВ, ЖИЛЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ 

XX. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДОВ И ПРОЕКТЫ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 

						
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измерения 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ (в месяцах)

  

 	  
 	изыскательские работы 

	проектные 
работы 
	
1 
	Генеральный план города в масштабе 1: 5000 со схемами инженерного оборудования и инженерной подготовки территории с населением      
 	тыс. чел.
 	До 50 
	4 
	7 

 	 

	От 50 до 100 

	5 
	8 

 	

 	От 100 до 250
  
 	7 
	10 

 	

 	От 250 до 500
  
 	10 
	14 

 	

 	От 500 до 1000
  
 	12 
	18 
	
2 
	Проект детальной планировки жилого района 
площадь жилого района 
население      
 	    га       
 тыс. чел.
 	100 
30 
	3 
	6 

 	  

 	  200   
 36-40 

	4 
	7 

 	  

   
 	300 
60 
	5 
	9 

 Примечания: 1. В нормах не учитывается выполнение работ по составлению схем районных планировок, схем расселения, технико-экономических обоснований и согласования их с соответствующими органами (Госпланом РСФСР, совнархозами, областными (краевыми) исполкомами и органами горного надзора и др.) 
            
2. К нормам по согласованию с заказчиком применяются коэффициенты: 
            
а) при составлении генерального плана города при трех и более разбросанных промышленных объектах, сильно развитым инженерным оборудованием или территорией, расчлененной на несколько частей (рекой, железной дорогой и т.д.), 1,15; 
            
б) при составлении генерального плана города с неблагоприятными природными условиями (сложный рельеф местности с уклоном поверхности менее 0,005 или более 0,05; наличием заболоченности, затопленности или оползней и оврагов) на площади более 30%  планируемой территории, 1,2; 
            
в) при составлении проектов планирования курортных городов 1,15. 

                
 
XXI. ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

									
Наименование объекта 
	Единица изме-
 рения 
	Коли-
 чество 
	Норма продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в календарных днях)

  

 	на стадии проектного задания 

	на стадии рабочих чертежей 

 	  
 	  
 	весь комплекс
 проектно-
 изыска-
 тельских
 работ 
	изыс-
 катель-
 ские
 работы 
	проек-
 тные
 работы 
	весь
 комплекс
 проектно-
 изыска-
 тельских 
работ 

	изыс-
 катель-
 ские
 работы 
	проек-
 тные
 работы 
	
Проекты планировки и застройки микрорайонов общественных комплексов и отдельных участков      
 	га 
	До 0,5 
	65 
	40 
	25 
	60 
	45 
	40 

	  
 	От 0,5 до 1 

	75 
	50 
	25 
	70 
	55 
	45 

	  
 	От 1 до 2
  
 	85 
	55 
	30 
	90 
	60 
	60 

	  
 	От 2 до 5
  
 	100 
	60 
	40 
	110 
	65 
	85 

 	  
 	От 5 до 10
  
 	130 
	80 
	50 
	120 
	80 
	90 

	  
 	От 10 до 20
  
 	155 
	90 
	65 
	140 
	100 
	105 

 	  
 	От 20 до 30
  
 	185 
	100 
	85 
	200 
	130 
	150 

 	  
 	От 30 до 40
  
 	210 
	110 
	100 
	230 
	140 
	180 

 	  
 	От 40 до 50 
	230 
	120 
	110 
	260 
	160 
	200 

Примечания: 1. Нормы, указанные в таблице, предусматривают разработку проектов планировки и застройки территорий, благоустройства, озеленения, инженерной подготовки, внешних сетей: водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения,  слаботочных устройств и газоснабжения в пределах красных линий участка застройки. 

2. В случае одновременной разработки проектов планировки и застройки с применением типовых проектов и разработкой нетиповых (индивидуальных) проектов жилых и гражданских зданий норма продолжительности проектирования определяется путем суммирования норм по таблицам разделов XXI, XХII и XХIII. 

3. При разработке проектов на территории со сложным рельефом (уклоны поверхности менее 0,5% или более 5%) на площади свыше 30% планируемой территории к табличным нормам вводится коэффициент 1,2. 

4. При разработке проектов малоэтажной застройки (1-2 этажа) или комплекса спортивных (физкультурных) площадок, водной станции, туристской и спортивной базы, пляжа или лодочной станции к нормам вводится коэффициент 0,5. 

5. Норма продолжительности разработки проектов планировки и застройки стадионов (спортивных центров) определяется по настоящей таблице с коэффициентом 1,5. 

6. Норма продолжительности разработки проектов планировки и застройки лечебно-профилактических учреждений определяется по настоящей таблице: 

а) при площади до 2 га с коэффициентом 1; 

б) при площади более 2 га с коэффициентом 0,9. 

7. Норма продолжительности разработки проектов планировки и застройки санаторно-курортных учреждений определяется по настоящей таблице: 

а) при площади до 2 га с коэффициентом 0,8; 

б) при площади более 2 га с коэффициентом 0,6. 

8. Нормы продолжительности разработки проектов планировки и застройки участков комплексов НИИ и вузов (разрабатываются только на стадии проектного задания) определяются по таблице раздела XXI с применением 1,5 при площади до 5 га и 1,25 при площади более 5 га. 

9. Все коэффициенты, указанные в вышеперечисленных примечаниях к таблице раздела XXI, вводятся только на проектные работы. 

            
 
XXII. ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Еди-
 ница изме-
 рения 
	Коли-
 чество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в календарных днях)

  

	  
 	на стадии проектного задания 

	на стадии рабочих чертежей 

 	  

 	весь 
комп-
 лекс
 проек-
 тно-
 изыс-
 катель-
 ских
 работ
 
	изыс-
 кате-
 льские
 рабо-
 ты 

	проек-
 тные
 рабо-
 ты 
	весь
 комп-
 лекс
 проек-
 тно-
 изыс-
 катель-
 ских
 работ 
	изыс-
 кате-
 льские
 рабо-
 ты 
	проек-
 тные
 рабо-
 ты 
	
1 
	Жилые дома квартирного типа, дома гостиничного типа и гостиницы площадью застройки 
	м 
	До 300 
	7 
	-
 	7 
	15 
	-
 	15 

 	

 	От 300 до 600 

	10 
	-
 	10 
	20 
	-
 	20 

 	

 	От 600 до 1200
  
 	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	

 	От 1200 до 3000
  
 	20 
	-
 	20 
	40 
	-
 	40 

 	 

 	От 3000 до 4000
  
 	25 
	-
 	25 
	55 
	-
 	55 

 	  

 	От 4000 и более 

	30 
	-
 
	30 
	65 
	-
 	65 
	
2 
	Административные здания, общеобразовательные
 школы, школы-интернаты, школы профтехнического
 обучения, техникумы, библиотеки, детские сады-ясли площадью застройки      
 	м 
	До 400 
	10 
	-
 	10 
	15 
	-
 	15 

 	
	  
 	От 400 до 700 

	12 
	-
 	12 
	20 
	-
 	20 

 	
	  
 	От 700 до 1000 

	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	
	  
 	От 1000 до 2000 

	25 
	-
 	25 
	35 
	-
 	35 

 	
	  
 	От 2000 до 3000 

	35 
	-
 	35 
	60 
	-
 	60 

 	 
 	  
 	От 3000 до 4000 

	45 
	-
 	45 
	75 
	-
 	75 

 	
	  
 	От 4000 до 5000 

	50 
	-
 	50 
	85 
	-
 	85 
	
3 
	Кинотеатры, клубы, дома культуры площадью застройки 
	м 
	До 600 
	5 
	-
 	5 
	10 
	-
 	10 

 	

 	От 600 до 1000 

	10 
	-
 	10 
	25 
	-
 	25 

 	 

 	От 1000 до 2000 

	15 
	-
 	15 
	40 
	-
 	40 

 	 

 	От 2000 до 3000
  
 	20 
	-
 	20 
	55 
	-
 	55 

 	  

 	От 3000 до 4000 

	25 
	-
 	25 
	60 
	-
 	60 

 	  

 	От 4000 до 5000
  
 	30 
	-
 	30 
	65 
	-
 	65 

4 
	Универсальные, промтоварные или продовольственные магазины, рестораны, столовые, кафе, закусочные площадью застройки 
	м 
	До 400 

	5 
	-
 	5 
	10 
	-
 	10 

 	 
 	  
 	От 400 до 1300
  
 	10 
	-
 	10 
	20 
	-
 	20 

 	 
 	  
 	От 1300 до 1600
  
 	15 
	-
 	15 
	25 
	-
 	25 

 	
	  
 	От 1600 до 2000 

	25 
	-
 	25 
	40 
	-
 	40 

 	
	  
 	От 2000 до 3000 

	40 
	-
 	40 
	70 
	-
 	70 

 	
	  
 	От 3000 до 3500
  
 	50 
	-
 	50 
	90 
	-
 	90 
	
5 
	Бани, прачечные площадью застройки 
	м 
	До 600
  
 	10 
	  -
 	10 
	15 
	-
 	15 

 	

 	От 600 до 1000 

	15 
	  -
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	  

 	От 1000 до 2000
  
 	20 
	  -
 	20 
	45 
	-
 	45 

 	  

 	От 2000 до 4000
  
 	40 
	  -
 	40 
	75 
	-
 	75 

 	  

 	От 4000 до 7000 

	50 
	  -
 	50 
	90 
	-
 	90 

 	  

 	От 7000 до 10000
  
 	65 
	  -
 	65 
	120 
	-
 	120 

 	  

 	От 10000 
до 13000
  
 	80 
	  -
 	80 
	145 
	-
 	145 
	
6 
	Здания лечебно-профи-
 лактических учреждений (поликлиника, амбулатория, больничное здание, диспансер, аптека, профилакторий, водолечебница, станция переливания крови, санэпидстанция и т.д.) площадью застройки 
	м 
	До 200 

	5 
	-
 	5 
	10 
	-
 	10 

 	
	  
 	От 200 до 400 

	10 
	-
 	10 
	20 
	-
 	20 

 	
	  
 	От 400 до 700 

	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	
	  
 	От 700 до 1000
  
 	15 
	-
 	15 
	40 
	-
 	40 

 	 
 	  
 	От 1000 до 1200 

	25 
	-
 	25 
	55 
	-
 	55 

 	
	  
 	От 1200 до 3000 

	35 
	-
 	35 
	70 
	-
 	70 

 	
	  
 	От 3000 до 4000
  
 	45 
	-
 	45 
	85 
	-
 	85 

 	
	  
 	От 4000 до 5000
  
 	50 
	-
 	50 
	100 
	-
 	100 
	
7 
	Главные или хозяйственные корпуса санаториев, домов отдыха, пансионатов и т.п. площадью застройки 
	м  
 	До 200 
	10 
	-
 	10 
	15 
	-
 	15 

 	

 	От 200 до 400 

	15 
	-
 	15 
	25 
	-
 	25 

 	

 	От 400 до 700
  
 	20 
	-
 	20 
	35 
	-
 	35 

 	

 	От 700 до 1000
  
 	25 
	-
 	25 
	45 
	-
 	45 

 	

 	От 1000 до 2000
  
 	40 
	-
 	40 
	55 
	-
 	55 

 	

 	От 2000 до 3000 

	50 
	-
 	50 
	75 
	-
 	75 

 	  

 	От 3000 до 4000
  
 	60 
	-
 
	60 
	90 
	-
 	90 
	
8 
	Спальные корпуса санаториев, домов отдыха, пионерлагерей или городков отдыха площадью застройки 
	м 
	До 300 
	5 
	-
 	5 
	10 
	-
 	10 

 	 
 	  
 	От 300 до 600
  
 	10 
	-
 	10 
	25 
	-
 	25 

 	
	  
 	От 600 до 1000
  
 	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	
	  
 	От 1000 до 2000
  
 	20 
	-
 	20 
	40 
	-
 	40 

 	
	  
 	От 2000 до 3000
  
 	25 
	-
 	25 
	55 
	-
 	55 
	
9 
	Спортивные корпуса, лыжевелопрокатные станции, конные манежи, закрытые искусственные бассейны для плавания площадью застройки (при проектировании закрытых тренировочных бассейнов применяется 1,2) 
	м 
	До 600 
	5 
	-
 	5 
	10 
	-
 	10 

 	

 	От 600 до 1000 

	7 
	-
 	7 
	25 
	-
 	25 

 	

 	От 1000 до 1500 

	10 
	-
 	10 
	35 
	-
 	35 

 	
	  
 	От 1500 до 3000 

	20 
	-
 	20 
	50 
	-
 	50 

 	
	  
 	От 3000 до 5500
  
 	30 
	-
 	30 
	60 
	-
 	60 
	
10 
	Крытые спортивные арены, легкоатлетические и футбольные манежи,
 искусственные ледяные катки площадью застройки     
 	м 
	5000 
	45 
	-
 	45 
	65 
	-
 	65 

 	 

 	От 5000 до 7500 

	60 
	-
 	60 
	80 
	-
 	80 
	
11 
	Открытые искусственные бассейны для плавания площадью застройки     
 	м 
	До 1000 
	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	 
 	  
 	От 1000 до 7000 

	25 
	-
 	25 
	45 
	-
 	45 
	
12 
	Стрелковые тиры площадью застройки 
	м 
	До 1000
  
 	10 
	-
 	10 
	30 
	-
 	30 

 	 

 	От 1000 до 7000
  
 	20 
	-
 	20 
	45 
	-
 	45 
	
13 
	Мототреки площадью застройки 
	м 
	До 6000 

	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	 

 	От 6000 до 20000
 
	25 
	-
 	25 
	50 
	-
 	50 
	
14 
	Велотреки площадью застройки 
	м 
	До 6000 

	10 
	-
 	10 
	15 
	-
 	15 

 	 

 	От 6000 до 20000
  
 	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 
	
15 
	Трибуны вместимостью более 10 тыс. зрителей площадью застройки 
	м 
	До 6000 
	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	 
 	  
 	От 6000 до 20000 
	25 
	-
 	25 
	50 
	-
 	50 

Примечание: Для трибун вместимостью до 10 тыс. зрителей для проектного задания принимают коэффициент 0,3, а для рабочих чертежей - коэффициент 0,4. 

 	
16 
	Лыжные трамплины для прыжков длиной до 60 м площадью застройки (на трамплины для прыжков длиной свыше 60 м вводить 1,5) 
	м 
	До 6000 

	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 

 	

 	От 6000 до 20000
 
	25 
	-
 	25 
	50 
	-
 	50 
	
17 
	Павильоны раздевальные для спортсменов, хозяйственные корпуса к 
спортсооружениям,
 эллинги, уборные - площадью застройки 
	м 
	До 1300 
	10 
	-
 	10 
	20 
	-
 	20 

 	          
	  
 	От 1300 до 5000 
	15 
	-
 	15 
	30 
	-
 	30 
	
18 
	Спортивные арены, спортивные ядра, тренировочные 
футбольные поля 
или демонстрационные игровые площадки 
	объект 
	1 
	55 
	45 
	10 
	30 
	-
 	30 
	
19 
	Площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, бокса, борьбы и других видов спорта 
	объект 
	1 
	35 
	30 
	5 
	10 
	-
 	10 

Примечания:  1. Нормы продолжительности проектирования по таблице раздела XXII даны для разработки проектов с применением типовых проектов отдельных зданий при наличии разработанных проектов застройки (микрорайона, лечебно-профилактического комплекса, стадиона и т.п.) 

2. При применении типового проекта отдельного здания на участке, не имеющем проекта застройки, к нормам по таблице раздела XXII (кроме норм на плоскостные сооружения) добавляется норма на разработку проекта застройки участка и изыскания по таблице раздела XXI. 

3. Если разработка проектов с применением типовых проектов жилых или гражданских зданий осуществляется одновременно с проектным заданием или с рабочими чертежами застройки (микрорайона или комплекса) путем выпуска проектных заданий или рабочих чертежей применения проектов нескольких жилых домов и гражданских зданий или всех жилых домов и всех гражданских зданий, расположенных на проектируемой территории, норма продолжительности проектирования определяется путем суммирования норм на застройку по таблице раздела XXI с нормами по таблицам разделов XХII и ХXIII, при этом норма на повторяющиеся в застройке (более 2 раз) типовые проекты принимается с коэффициентом 0,7 при выраженном рельефе, и с коэффициентом 0,5 при спокойном рельефе, если нулевые циклы в этих проектах не меняются. 

4. При дополнительных работах, связанных с применением к участку строительства типового проекта, к нормам по таблице раздела XXII по согласованию с заказчиком вводятся следующие коэффициенты: 

а) при переработке фундаментов - 1,2; 

б) при проектировании подвала - 1,4; 

в) при исключении или перепланировке подвала - 1,2; 

г) при проектировании цокольного этажа - 1,6; 

д) при перепланировке первого этажа - 1,4. 

5. При применении к участкам строительства типового проекта в зеркальном изображении к норме по таблице раздела XXII вводится коэффициент 1,3. 

          
 
XXIII. НЕТИПОВЫЕ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ) ПРОЕКТЫ 

										
N
 п/п 
	Наименование объекта 
	Единица измере-
 ния 
	Количество 
	Нормы продолжительности 
проектно-изыскательских работ 
(в календарных днях)

  

   
 	  
 	на стадии проектного задания 
  
 	на стадии рабочих чертежей 

  

 	  
 	весь 
комп-
 лекс 
проек-
 тно-
 изыс-
 катель-
 ских 
работ
 
	изыс-
 кате-
 льские рабо-
 ты 
	проек-
 тные 
рабо-
 ты 
	весь 
комп-
 лекс 
проек-
 тно-
 изыс-
 катель
 ских 
работ 
	изыс-
 кате-
 льские
 рабо-
 ты 
	проек-
 тные 
рабо-
 ты 
	
1 
	Театры с количеством мест зрительного зала     
 	мест 
	От 600 до 800 
	160 
	40 
	120 
	350 
	45 
	340 

 	
	  
 	От 800 до 1000 

	170 
	40 
	130 
	380 
	45 
	360 

 	 

	  
 	От 1000 до 1200 

	180 
	40 
	140 
	420 
	45 
	400 
	
2 
	Цирки вместимостью 
	мест 
	2000 
	200 
	40 
	160 
	475 
	45 
	450 
	
3 
	Научно-исследовательские институты I категории сложности проектирования в составе: отдельных корпусов (общественных) гуманитарных наук и отдельных корпусов общего назначения НИИ всех профилей науки при рабочей площади здания    
 	м 
	До 500 
	80 
	45 
	50 
	100 
	45 
	90 

 	

 	От 500 до 1500
  
 	140 
	45 
	110 
	200 
	45 
	180 

 	

 	От 1500 до 3000 

	170 
	45 
	140 
	230 
	45 
	210 

 	 

 	От 3000 до 5000 

	190 
	60 
	165 
	270 
	60 
	250 

 	

 	От 5000 до 6000 

	230 
	60 
	200 
	350 
	60 
	330 

 	

 	От 6000 до 7500 

	250 
	60 
	220 
	415 
	60 
	400 

 	

 	От 7500 
до 10000 

	280 
	60 
	250 
	470 
	60 
	450 
	
4 
	Научно-исследовательские институты II категории в составе: отдельных зданий основных лабораторных корпусов физических, химических и геологических наук; экспериментальных 
мастерских; вивария; технических блоков НИИ; специальных складов 
НИИ; оранжерей;
 вегетационных домиков; опытно-испытательских станций (сейсмических,
 вулканических и др.) рабочей площадью зданий 
	м 
	До 500 
	105 
	45 
	75 
	140 
	45 
	110 

 	 

 	От 500 до 1500 

	150 
	45 
	120 
	240 
	45 
	210 

 	  

 	От 1500 до 3000
  
 	180 
	45 
	150 
	280 
	45 
	250 

 	

 	От 3000 до 5000
  
 	210 
	60 
	180 
	330 
	60 
	300 

 	

 	От 5000 до 6000
  
 	250 
	60 
	220 
	380 
	60 
	350 

 	
	  
 	От 6000 до 7500
  
 	280 
	60 
	250 
	480 
	60 
	450 

 	

 	От 7500 
до 10000
 
	330 
	60 
	300 
	580 
	60 
	550 
	
5 
	Научно-исследовательские институты III категории в составе: отдельных зданий лабораторных корпусов всех профилей науки, работающих по новой тематике и требующих специального оборудования; лабораторий и корпусов, работающих с радиоактивными изотопами индикаторной активности;
 вычислительных  центров; автоклавных взрывных павильонов; снаряжательных станций; экспериментальных,
 модельных, стендовых корпусов; криогенных лабораторий при рабочей 
площади зданий      
 	м 
	До 500 
	110 
	45 
	80 
	170 
	60 
	140 

 	

 	От 500 до 1500
  
 	170 
	45 
	140 
	280 
	60 
	250 

 	

 	От 1500 до 3000 

	210 
	45 
	180 
	330 
	60 
	300 

 	

 	От 3000 до 5000 

	250 
	60 
	220 
	380 
	80 
	350 

 	

 	От 5000 до 6000 

	310 
	60 
	280 
	430 
	80 
	400 

 	

 	От 6000 до 7500 

	360 
	60 
	330 
	530 
	80 
	500 

 	

 	От 7500 
до 10000 

	430 
	60 
	400 
	630 
	80 
	600 
	
6 
	Учебные корпуса при объеме здания      
 	тыс. м 
	До 10 
	105 
	45 
	75 
	230 
	45 
	200 

 	

	От 10 до 20 

	110 
	45 
	80 
	250 
	45 
	220 

 	  

 	От 20 до 40 

	120 
	45 
	90 
	270 
	45 
	240 

 	  

 	От 40 до 60 

	130 
	60 
	100 
	290 
	60 
	260 

 	  

 	От 60 до 90 

	150 
	60 
	120 
	310 
	60 
	280 

 	  

 	От 90 до120 

	170 
	60 
	140 
	330 
	60 
	300 
	
7 
	Учебно-лабораторные корпуса при объеме здания      
 	тыс. м 
	До 10 
	130 
	45 
	100 
	270 
	45 
	240 

 	

	От 10 до 20
  
 	135 
	45 
	105 
	280 
	45 
	250 

 	
	  
 	От 20 до 40
  
 	140 
	45 
	110 
	290 
	45 
	260 

 	  
 	  
 	От 40 до 60
  
 	150 
	60 
	120 
	310 
	60 
	280 

 	  
 	  
 	От 60 до 90
  
 	165 
	60 
	135 
	330 
	60 
	300 

 	  
 	  
 	От 90 до120 
	180 
	60 
	150 
	350 
	60 
	320 

 Примечания:  1. Нормы продолжительности проектирования по таблице раздела XXIII предусматривают разработку проектов отдельных нетиповых зданий, а для театров и цирков одновременно разработку проектов застройки, планировки и благоустройства участков площадью до 1 га и проектов инженерных сетей в пределах этого участка. При территории участка более 1 га к табличным нормам на театры и цирки добавляется норма на проектирование застройки территории свыше 1 га по таблице раздела XXI. 

2. При одновременном проектировании всех или нескольких зданий комплекса нормы продолжительности проектирования следует исчислять путем суммирования нормы на здание большого объема с нормами на остальные здания, принимаемые по таблице раздела XXIII с 0,7, и добавлять нормы на разработку проекта застройки по таблице раздела XXI. 

3. При разработке проектов театров и цирков нормы учитывают также разработку чертежей механизации и освещения сцены. 

4. При разработке проектов научно-исследовательских институтов нормы учитывают разработку проектов автоматизации, диспетчеризации и кондиционирования воздуха. 

5. При разработке проектов учебных и учебно-лабораторных корпусов со стенами из крупных блоков или панелей к нормам вводится коэффициент 1,1. 

6. На стадии рабочих чертежей нормами учтена разработка чертежей на отделку основных помещений, вестибюлей и лестниц. 

                  

Текст документа сверен по:
 официальное издание 
М.: Стройиздат, 1964